아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국전력공사 사장(남서울본부장)
(경유)	(전력관리처)
제목	개포전력구 기설 구조물 철거방안 협의 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 "양재대로 구조개선사업"중 개포전력구의 기설 구조물 철거 관련 변경 시공방안을 아래와 같이 협의 요청드리니 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

ㅇ 검토사항

1) 내    용 : 기설 전력구 철거부분 변경

2) 변경사항 : 당초 : 기설전력구 전체 철거

변경 : 벽체, 상단 슬래브 철거 및 바닥기초 존치 후 보강 시공

3) 사    유 : 기설 전력구 철거작업에 의한 진동 발생 및 콘크리트 비산 잔해물로 인한 안정성 우려

붙임 1. 변경시공안 검토서 1부.

2. 변경도면 및 구조계산서 1식.(별도송부).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	노승환		토목설계과장	박운용		토목부장	09/15
이임섭
협조자	주무관	이나영
시행	토목부-17409	(	2023. 9. 15.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 토목부 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2163	/전송	02-6438-2199	/	roh9595@seoul.go.kr	/	부분공개(5)