문서번호	시설보수과-5510
결재일자	2023. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김수천		09/15
		김시련
협 조
	주무관			윤은지

혁신제품 시범사용 납품기한  연기요청 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.9.

성동도로사업소

(시설보수과)

혁신제품 시범사용 납품기한 연기요청 검토보고

우리사업소에서 사용예정인 혁신제품(복합형 탄성 프리캐스트 신축이음채움재) 시범사용과 관련하여 설치장소 및 수량변경 등으로 인한 납품기한 연기사항이 발생하여 보고드림

1		공사개요

□ 사 업 명 : 2023년 혁신제품 시범구매(복합형 탄성 프리캐스트 신축이음채움재)

□ 계 약 일 : 2023.8.10(계약일로부터 30일)

□ 도 급 액 : 131,000천원

□ 납품업체 : (주)오에이티엠엔씨  대표 권봉주

□ 설치장소 및 수량 : 동진교 (L=28.8m)

2		보고내용 및 검토결과

□ 납품기한 연기 요청

○ 납품기한   (당초) 계약일(8월10일)로 부터 30일.

(변경) 계약일(8월10일)로 부터 51일.

○ 연기사유 : 혁신제품 설치장소 지정 및 수량변경으로 인해 제품 제조 착수 지연에 따른 납품일정 연기

□ 검토결과

○ 혁신제품 설치장소 지연 및 수량 변경 등으로 인한 제품 제조 착수일정이 지연된 사항으로 납품연기 조치함이 타당할 것으로 판단됨.

○ 지제상금 부과여부 : 미부과

3		조치계획

□ 상기 검토 사항과 같이 납품기한 연기 승인하여 제작설치에 만전을      기하고자 함.

○ 납품기한 변경 승인

(당초) 계약일(8월10일)로 부터 30일.

(변경) 계약일(8월10일)로 부터 51일.

붙임 : 혁신제품 시범구매 납품연기 요청 관련서류 1부.  끝