문서번호	치수과-14943
결재일자	2023. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	부구청장 제448호

주무관		치수팀장		치수과장	안전건설교통국장		부구청장
이은찬		오상호		민병기	신용철		전결 09/15
							유보화
협조
	기획재정국장		어용경
	재무과장		나재진
	계약팀장		代이지현

제3회 설계변경 추진 계획[2023년 하수관로 준설(물청소)공사(단가계약)]

「2023년 하수관로 준설(물청소)공사(단가계약)」

제3회 설계변경 검토보고

2023. 9.

안전건설교통국 치수과

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [√]( 특별조정교부금 ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
구민의견 수렴		●	방법	:	설문조사 [ ] 만족도 조사 [ ] 찬반투표 [ ] 기타 [ ]
		●	시기	:	시행 전 [ ] 시행 중 [ ] 시행 후 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [√] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목:
	● 중점 홍보사항
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「2023년 하수관로 준설(물청소)공사(단가계약)」

제3회 설계변경 검토보고

『2023년 하수관로 준설(물청소)공사(단가계약)』와 관련, 공사물량 변경 등에 따른 설계변경 추진계획 보고임.

□ 관련근거

○ 2023년 제4차 특별조정교부금 교부(기획예산과-10209, `23. 7.27)

- 빗물펌프장 유수지 및 유입암거 준설 330백만원

○ 공사 현안사항 검토보고(치수과-13515, `23. 8.24)

- 재배정 예산(특교금) 활용방안 / 장마종료 및 2차 우기 대비 빗물펌프장 유수지 및 유입암거 퇴적 준설토 정비 등

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 2023년 하수관로 준설(물청소)공사(단가계약)

○ 기    간 : 2023. 2.28. ~ 12.31.

○ 내    용 : *******************************

○ 도 급 비 : **************

○ 시 공 사 : ****************

○ 공 정 률 : 75%

□ 추진경과

○ 2023. 2.28.     공사계약 및 착공

○ 2023. 4. 3.     설계변경(1회)

- 여름철 집중호우 대비 빗물펌프장 및 하천준설 예산 반영

○ 2023. 6. 9.     설계변경(2회)

- 마장축산물시장 일대 하수관로 물청소 및 유수지 악취저감 예산 반영

○ 2023. 8.24.    공사 현안사항 검토보고(치수과-13515)

□ 보고내용

○ 빗물펌프장 유수지 및 유입암거 준설물량 등 설계변경 반영

- 장마종료 및 2차 우기대비 빗물펌프장 유수지 및 유입암거 등에 퇴적된 토사에 대한 준설 시행으로 원활한 통수기능 확보

○ 공사비 변동내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감
총 공 사 비	*************	*************	**************
도 급 비	*************	*************	**************
이 전 비	***********	***********	*

○ 주요공종 변동물량 내역

구 분	공 종	단위	수 량		증·감
			당초	변경
준 설	수로암거준설(진공흡입차 7.64㎥)	㎥	***	***	********
	암거준설(로더 0.25㎥, L=50m)	㎥	***	***	********
	암거준설(로더 0.25㎥, L=100m)	㎥	***	***	********
	암거준설(로더 0.25㎥, L=150m)	㎥	***	**	********
	흡입준설(진공흡입차 7.64㎥)	㎥	*****	*****	********
	흡입준설(진공흡입차 3㎥)	㎥	***	**	********
	버킷준설	㎥	**	*	********
물청소 (세정)	하수관 세정(25톤)	m	******	*******	********
	하수관 세정(3톤)	m	*****	***	********

□ 조치계획

○ 추가물량 반영에 대한 설계변경계약을 시행하고, 향후 실물량 정산처리코자 함.

붙임  1. 변경내역서(제3회) 및

2. 검증확인서 1부.

3. 공사 현안사항 검토보고 1부.

4. 일상감사 의견서 1부.  끝.