현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
	성 북 구
수신	내부결재
(경유)
제목	정릉로10다길49일대 외 3개소 하수관로 개량공사 설계변경(최종) 시행

우리 구에서 시행중인「정릉로10다길49일대 외 3개소 하수관로 개량공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회, 최종)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 정릉로10다길49일대 외 3개소 하수관로 개량공사

2. 공사기간 : 2023. 4. 6. ~ 2023. 10. 2.

3. 도 급 자 : 송명개발㈜ 대표 백경수

4. 설계변경 내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비 고
총 공사비	772,984,700	917,344,060	증)	144,359,360
도 급 비	519,295,700	598,080,000	증)	78,784,300
관 급 비	140,296,000	203,960,000	증)	63,664,000
이 전 비	113,393,000	115,304,060	증)	1,911,060

5. 설계변경 사유 : 현장여건 변경에 따른 시공물량 증·감

6. 예산과목(도급비 증가분)
- 물재생계획과, 하수시설관리(사업), 하수관로 신설개량(사업), 하수시설물 긴급복구 및 정비,    수선유지교체비, 수선유지비(금78,784,300원) -(공기업하수도사업특별회계)

붙  임   1. 설계변경 사유서 1부.
2. 설계변경 내역서 1부.
3. 제비율검증확인서 1부.
4. 관련 방침서(예산재배정 등) 1부.
5. 일상감사 결과 각 1부.  끝.

주무관	이혜선		하수담당	김정훈		치수과장	김윤기		건설교통국장	09/15
김석우
협조자	계약담당	조은숙		재무과장	代김미경
시행	치수과-15944	(	2023. 9. 15.	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168, 10층	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-3652	/전송	02-2241-6563	/	hslee0129@sb.go.kr	/	부분공개(5)