의원 요구 자료 제출

시 행	건축기획과-20442	(	2023. 9. 18.	)
접 수		(		)
결재일자	2023. 9. 18.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자 참조
수신자	기획담당관, 주택정책과장

주무관	건축관리팀장	건축기획과장	주택정책실장		결재
진수희	정경승	박순규	09/18
			한병용
협 조
	주택공급기획관			김승원
	동남권사업반장			김동철
	총괄계획팀장			代김학두
	주무관			정유빈
	주무관			김민지

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 2497번, 김교흥의원, 행정안전위원회)

따로붙임 :      (국회․시)의원 요구자료 1부.  끝.

김교흥 의원(행정안전위원회,더불어민주당)

요구번호 : 2497

- 현대차 gbc 프로젝트 관련

1) 진행경과

2) 현재 공정률

3) 공사 관련 과태료, 벌금내역, 그간 서울시 또는 강남구의 행정처분 내역

4) 한전부지 매입 당시 2016년 착공 계획이 무산된 이유

5) 언론 보도에 따르면 2020년 터파기를 시작한다 했으나 현재까지 진척이 안되는 이유

6) 그간 현대차가 공식 비공식적으로 서울시 또는 강남구와 협의한 내역

□ 현대자동차 GBC 관련

진행 경과

- 붙임 참조

2. 현재 공정률

- 공정률 3.46%(토공사 진행중, 23.9.기준)

3. 공사관련 과태료, 벌금, 행정처분 내역

- 해당없음

4. 한전부지 매입 당시 2016년 착공계획이 무산된 이유 (동남권사업과 작성)

- 당초 사전협상 완료(`16.2.), 도시관리계획 변경 절차(`16.9. 심의) 후 건축허가 절차를 이행할 계획이었음.

- 이후 건축허가를 위한 사전절차(수도권정비심의, 건축심의 등)를 진행, `19.11월 건축허가를 득함.

※ 건축심의 등 제영향평가('17.1.~'19.1.), 수도권정비위원회 심의('17.12~'19.1.)

5. 언론 보도에 따르면 2020년 터파기를 시작한다 했으나 현재까지 진척이 안되는 이유

- 현대차 GBC 신축공사는 2019.11.26. 건축허가를 득한 후 2020. 5. 6. 공사를 착공하였음

- 현재 흙막이 공사(지하연속벽, C.I.P.)완료 후 터파기 공사 진행 중임.

6. 현대차가 공식, 비공식적으로 서울시, 강남구와 협의한 내역(동남권사업과 작성)

[ 서울시 ]

- ′15.07. ~ ′16.02.	: 현대차 GBC부지 관련 협상조정협의회 개최(10회)

- ′19.04.	: 추가협상을 위한 협상조정협의회 개회(1회)

※ 강남구 협의 관련 사항은 추후 별도 제출

□ 현대자동차 GBC 건축개요

○ 위    치 : 서울시 강남구 영동대로 512 (삼성동 167번지)

○ 대지면적 : 74,148.00㎡ (건축면적 : 34,503.41㎡)

○ 건축규모 : 지하7층/지상105층, 주5동, 연면적 913,955.78㎡

○ 최고높이 : 560.6m

○ 주 용 도 : 업무시설, 숙박시설, 문화 및 집회시설, 판매시설 등

○ 건 축 주 : 현대자동차(주) 외 2

따로붙임 : GBC사전협상 및 건축허가 처리 경과 1부.  끝.

작성자	기관명	직 위	성 명
	서울시청 (건축기획과) (동남권추진단)	담당사무관	정경승 최영서
	☎2133-7112 ☎2133-8256	주무관	진수희 정유빈
	작 성 일 : 2023. 9.15.