문서번호	도로보수과-6311
결재일자	2023. 9. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
민병훈		엄기영	09/18
			심형보
협조

『2023년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』관련

낙찰차액 사용계획 보고

2023. 9.

성동도로사업소

(도로보수과)

『2023년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』관련

낙찰차액 사용계획 보고

지난 7월부터 계속된 집중호우 및 태풍으로 인해 도로파손(포트홀, 균열, 침하, 소성변형 및 공동발생복구 등)이 급증되어 민원발생 및 교통안전사고를 예방하고자 포장도로 긴급복구공사 발주·계약시 잔여예산(낙찰차액 등)을 사용하여 도로정비가 필요한 구간에 대하여 추가 사용하여 안전한 도로환경을 조성코자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 시설비 및 시설부대비 낙찰차액 사용관련 안내(예산담당관-4883호, ’20.04.03.)
- 사업계획 변경에 따른 물량확대시 기존 계약 낙찰차액 사용 가능

□ 도로포장 및 시설물 유지관리실태 감사 결과에 따른 조치계획 알림(도로관리과-13607호 , '21.09.28)

- 관련 당초 계약된 도급액을 초과(10% 범위내 설계변경 가능)하는 경우 별도 발주

※ **************************************************************

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명: 2022년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)

□ 공사기간: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

□ 공사규모

-**************           - ***********************
- ***********               - ****************

□ 총공사비: **********************************************

□ 공정률(9. 7. 기준) : ************************

- 공사비: 도급비, 관급자재비 포함 개략공사비(이전비 제외)

(단위:천원)

구분	공종별	계약분		정비완료(1~6차)		잔여분
		물량	금 액	물량	공사비	물량	공사비
계(공사비)			*********		********* *******		******* *******
도급비	소파보수 등 공사 도급비	**** *******	*********	****** *******	********* *******	******* *******	******* *******
	야간긴급출동	******* *********	*******	******* ********	******* *******	*******	******* *******
	소 계		*********		********* *******		******* *******
관급비	아스팔트 콘크리트 (WC-3, WC-2, BB-2) 미끄럼방지포장 등	******	*******	******	******* *******	****	****** *******

□ 예산현황(사업소 재배정예산 : *************)

(단위:천원)

예산과목 (세부사업)	예산액	공사금액				계약심사 절감액	낙찰차액	비고
		발주시	계약(도급비)	관급비	이전비
계	*********	*********	*********	*******	******	******	*******
노후포장도로정비공사 (긴급복구공사 물고임정비)	********* *********** *********	*********	*********	*******	******	******	*******
도로유지일상관리 (야간긴급출동)	*******	*******	*******	*	*	*
도로함몰예방사업 (공동굴착복구)	*******	*******	*******	*	*	*
도로시설물(터널,지하차도) 일상유지관리(시설보수과)	******	******	******	*	*	*

※ 잔여예산(계약심사절감액+낙찰차액) : *********

Ⅲ		보고내용

□ 여름철 이상기온 및 집중호우로 인한 도로 소파정비 물량증가에 따른 도급비 및 관급자재비 부족 발생

① 중대시민재해 예방을 위한 항구복구 소요예산(8차작업지시) : *********

- ***************************

정비 규모 (8차)	◈ 소파보수 :**************************************** ◈ 공동보수 : ************************ ◈ 중규모 기계포장 : *********************** **************************

② 시공물량 증가에 따른 관급자재(아스팔트 콘크리트) 추가구매 필요

- 공사용 관급자재 구매 현황

(단위: 톤)

품 명	규격	계약 물량	시공물량			우기포트홀 (재난기금)	관급자제변경계약	비고
			소계	사용량 (1~6차)	8차 (예정)
아스팔트 콘크리트	표층용,WC-2, 3등급(공장상차도)	*****	*****	*****	***	***	***** ********
	표층용,WC-3, 1등급(현장하차도)	***	***	***	***	*	*** ******
	기층용,BB-2, 3등급(현장하차도)	**	*	*	*	*	** ****
	합 계	*****	*****	*****	***	***	*****

③ *****************************************

- ***************************************************** **********)

- *******************************************

※ ********************************************

④ 7차 작업지시(우기포트홀 도로보수) 공사비 제외

- *****************************************************

Ⅳ		조치계획

□ 예산확보 방안 낙찰차액등 잔여예산 사용***********

- 상기 보고내용과 같이 추가 예산확보가 필요함에 따라 본 공사의 잔여예산을 사용하여 중대시민재해 예방 및 쾌적한 도로환경 조성.

◈ ********************************

□ 설계변경 시행내역(건설사업관리자 검토전)

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총공사비	*********	*********	**********
도급비	*********	*********	**********
관급비	*******	*******	**********
이전비	******	******	****

※ **************) : 물량증·감 등 상세 내역은 건설사업관리자 검토후, 설계변경 시행 예정

□ 7차 작업지시(우기포트홀) 관련 재난기금 예산 미확보로 선행공사비(도급비) 지급이 어려운 실정으로 재난관리기금 배부 통보시 설계변경하고 정산 시행

- 도급비 : 재난관리기금 예산 배정시 설계변경 및 변경계약(증액) 시행후 정산,

- 관급자재 : *****************************************************

Ⅴ		향후계획 및 기타사항

□ 2023.09.18. :  잔여예산 사용에 따른 설계변경 검토 지시(사업소 → 건설사업관리단)

□ 2023.09.20. : 설계변경시행 및 변경계약     .

□ 2023.9.22. : 기성검사(2차) 및 대금지급

□ 2023.10월중 : 재난관리기금 예산배부(도로관리과→사업소)

□ 2023.10.30. : 예산배부(재난관리기금)에 따른 설계변경(중액) 시행 및 정산

붙임: 1. 제8차 작업지시서 1부.

2. 설계변경 내역서(건설사업관리자 검토전) 1부.
3. 시설비 및 시설부대비 낙찰차액 사용관련 안내 1부.
4. 안전감사결과에 따른 조치계획 알림 1부. 끝