아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경(1차) 및 차수별 부기금액 변경시행에 따른 계약의뢰 [2023년 삼성1동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)]

우리사업소에서 시행중인 「2023년 삼성1동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)」에 대하여 설계변경(1차) 계약을 아래와 같이 의뢰하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2023년 삼성1동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 계 약 자 : 동남건영(주) 대표 ***

다. 계약기간 : 2023.06.29. ~ 2023.12.31.(총계약기간 2023.06.29. ~ 2024.06.30.)

라. 공사개요

- 당초 : D13 ~ 300mm, L= 1,143m

- 변경 : D13 ~ 300mm, L= 975m

마. 설계변경 내역

					(단위 : 원)
구분		총부기금액		1차수 금액		2차수 금액	비고
계약금액	당초	***********		***********		***********
	변경	***********		***********		***********
	증감	*		**************		**************

바. 설계변경 사유 : 계약물량 증·감에 따른 설계변경

사. 하자기간 : 준공검사일로부터 3년

아. 최대이행금액 : ************

자. 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 급배수공사비, 신설공사비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 개조공사비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비

붙임  설계변경 관련문서 각 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	민윤화		급수운영팀장	신중선		급수운영과장	09/18
박종일
협조자
시행	급수운영과-16160	(	2023. 9. 18.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4844	/전송	02-3146-4889	/	myh228@seoul.go.kr	/	부분공개(5)