문서번호	도로보수과-9620
결재일자	2023. 9. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
박해웅		신준식	09/19
			임대운
협 조
	주무관			이창석

2023년 노후포장도로 정비공사(1구역)

공사 변경추진계획 보고

2023. 9. .

동부도로사업소

(도로보수과)

2023년 노후포장도로 정비공사(1구역)

공사 변경추진계획 보고

2023년 노후포장도로 정비공사가 완료단계에 있어, 전반적인 공사추진 현황 및 예산변경 현황을 보고드리고 추가 공사계획 및 낙찰차액 사용계획 등을 종합적으로 검토하여 보고드림

1		공사개요

공 사 명: 2023년 노후포장도로 정비공사(1구역)

공사기간: 2023.03.16. ~ 2023.11.30.

시 공 자:*******************************

총공사비: ***************************************

2		현재까지 공사추진 내역

현 공정율 93.3%

연번	도로명	공사구간	폭(m)	연장(m)	면적(a)	완료	미완료	비고
합계					******	****	*****
1	광평로	태화복지관R~대왕중교R	********	*****	****		*
2	언주로	성수대교~성수대교남R	****	*****	****	*
3	헌릉로	세곡삼거리→세곡사거리	****	***	****	*
4	광평로	일원역R →대모산입구R	****	*****	****	*
5	헌릉로	세곡1교~은곡마을R	****	****	****	*
6	논현로	양재전화국R~도곡1동주민센터R	****	*****	*****	*
7	언주로	언주로615→경복아파트R	**	*****	****	*
8	밤고개로	SRT수서역~교수마을입구	**	*****	*****	*
9	남부순환로	매봉터널R→매봉역R	*******	*****	****	*
10	헌릉로	세곡사거리(양재방향)	**	****	****	*
11	도곡로	탄천교~아시아선수촌아파트R	****	*****	*****	*
12	역삼로	역삼로443~대치사거리	**	*****	****	*
13	역삼로	우성아파트R~역삼초교R	**	*****	****	*
14	역삼로	역삼초교R~구역삼세무서R	**	*****	****	*
15	역삼로	개나리아파트R→구역삼세무서R	***	*****	****	*

3		예산현황 및 공사비 검토

예산 현황

(단위:원)

계	기 재배정 (노후포장정비)	추가 재배정		비 고
		재난관리기금 (포트홀복구)	재난관리기금 (결빙방지포장)
*************	*************	***********	*************	*****************

설계구간 투입 공사비 개략 내역

(단위:천원)

계	포장정비공사				폐아스콘 처리비	비 고
	소계	도급비	관급비	이전비
*********	*********	*********	*********	*	*******	******* *******

4		향후 공사추진 계획

포장파손(포트홀, 균열, 침하)으로 정비가 시급한 구간은 예산범위 내에서  추가정비 시행하고 결빙방지포장 예산재배정에 맞추어 추가공사 시행

○ 노후포장도로 추가정비 시행(A=109.2a)

************************************************

*****************************************

○ 결빙방지포장 시행

******************************************

잔여공사 포함 공사비 검토

(단위:천원)

구분	계	포장정비공사				폐아스콘 처리비
		소계	도급비	관급비	이전비
합계	*********	*********	*********	*********	*****	*******
포장정비	*********	*********	*********	*********	*****	*******
포트홀복구	*******	*******	*******	******	*	*
결빙방지	*********	*********	*******	*********	*	******

낙찰차액 사용 계획

○ 상기 공사추진을 위해 당해 공사/용역의 낙찰차액 전액 사용

- 낙찰차액: 288,611천원(공사 217,935천원, 용역 50,149천원, 관급자재 20,527천원)

예산 사용 계획

(단위:천원)

구분	계	노후포장 정비	재난관리기금			비고
			소계	포트홀항구복구	결빙방지포장
합계	*********	*********	*********	*******	*********
노후포장공사	*********	*********	*********	*******	*********
폐아스콘처리	*******	*******

공사추진 일정

- '23.10.10: 결빙방지포장재(아스콘) 선정시험

- '23.10.20: 추가구간 및 결빙방지포장공사 시행

- '23.11.10: 아스콘 관리시험 완료

- '23.11.30: 공사준공

붙임 1. 추가공사구간 위치도 및 현황사진 각 1부.

2. 개략 변경내역서 1부.  끝.