아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(방재성능 초과강우 대비 대응방안 수립지침 마련 용역)

1. 치수안전과-16555(2023.9.15.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진 중인「서울시 방재성능 초과강우 대비 대응방안 수립지침 마련 용역」의 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 서울시 방재성능 초과강우 대비 대응방안 수립지침 마련 용역

나. 용역기간 : 2022. 06. 15. ~ 2023. 09. 30.

다. 계 약 자 : ㈜유신,  ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소

라. 계약금액 : 금263,400,000원

마. 준공기한 연기내역

- (당초) 2022. 06. 15. ~ 2023. 09. 30.

- (변경) 2022. 06. 15. ~ 2023. 11. 30.

바. 연기사유 : 방재성능 초과강우 대비 비구조적 대책 방안의 구체화 등 용역 추진현황 보고회 검토사항 추가 반영

사. 예산과목 : 물순환안전국 치수안전과, 치수 및 하천 관리, 수방대책 사업, 서울시 방재성능 초과강우 대비 대응체계 수립용역, 시설비

붙 임  1. 준공기한 연장요청 공문 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.

4. 준공기한 연기 검토보고(방침) 1부.  끝.

	치 수 안 전 과 장
주무관	이동섭		치수총괄팀장	김지환		치수안전과장	09/18
최연호
협조자
시행	치수안전과-16661	(	2023. 9. 18.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 덕수궁길15, 서소문청사 1동 8층(치수안전과)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	010-75575	/전송	02-2133-3868	/	lds0420@seoul.go.kr	/	부분공개(5)