문서번호	기반시설과-2310
결재일자	2023. 9. 19.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이균휴		이석근	09/19
			이유국
협 조

「양화대교 북단외 1개소 승강기 설치공사」

설 계 변 경   검 토 보 고

2023. 09.

미 래 한 강 본 부

(기반시설과)

「양화대교 북단외 1개소 승강기 설치공사」

설계변경(2차2회)검토 보고

『양화대교 북단외 1개소 승강기 설치공사』에 대한 준공기한 연기보고임.

〔에쓰와이(양화) 제2023-9-19호)〕

1		공 사 개 요

◯ 공 사 명 : 양화대교북단외 1개소 승강기 설치공사

◯ 위    치 : 양화대교북단 하류측 및 동호대교남단 상류측

◯ 규    모 : 승강기(21인승) 및 비상계단 설치

◯ 기    간 : 2022.05.16. ~ 2023.09.30.

◯ 도 급 사 : 에쓰와이이앤씨(주) 대표 정민호

◯ 도 급 비 : 3,150,374천원(2차 1,650,374천원)

<위치도 및 조감도>

양화대교 북단

동호대교 남단

2		보 고 내 용

◯ 공기부족

- 잦은 강우(5~9월, 36일)로 인한 공사중단으로 작업일수 부족

- 승강기 개통지연 및 개통후 시험운행 기간 필요

◯ 설계변경내역

- 공사기간 연장

· 총차: (변경전)2022. 5.16. ~ 2023. 9.30.

(변경후)2022. 5.16. ~ 2023. 10.30.(증30일)

· 2 차: (변경전)2023. 1. 6. ~ 2023. 9.30.

(변경후)2023. 1. 6. ~ 2023. 10.30.(증30일)

- 계약금액 : 변동없음

(단위:원)

구 분	총 차	2 차	비 고
*******	*************	*************	****
******	*************	*************
***	*	*

3		조 치 의 견

◯ 공사의 정밀 및 안전시공 확보를 위해 준공기한 연기조치하여 공사   추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  실정보고서(준공연장) 1부.  끝.