문서번호	토목과-12602
결재일자	2023. 9. 19.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

지방시설주사		굴착복구팀장		토목과장		안전건설교통국장
강선덕		조영두		代김경원		전결 09/19
						신용철
협조
	재무과장		나재진
	계약팀장		황미란

2023년 도로굴착복구공사(단가계약) 설계변경(2회) 시행 검토보고

『2023년 도로굴착복구공사(단가계약)』

설계변경(2회) 시행 검토보고

2023. 9.

[토목과]

『2023년 도로굴착복구공사(단가계약)』

설계변경(2회) 시행 검토보고

2023년 도로굴착복구공사(단가계약)의 현장여건에 따른 공종별 물량 증·감 반영 및 품질시험비 반영에 대한 설계변경 검토보고임

1		공사개요

□ 공 사 명: 2023년 도로굴착복구공사(단가계약)

□ 공사기간: 2023. 3. 6. ~ 2023. 12. 31.

□ 도 급 자: ****주식회사 대표 ***

□ 공사규모: 아스팔트포장 A=115a, 보도포장 A=21.4a 등

□ 총공사비: ***************

- **********************************************

2		추진경과

□ '23.03.06.: 공사착공

□ '23.03.30.~09.15.: 작업지시(1차~8차) 및 작업완료(1차~7차)

□ '23.12.31.: 공사준공(예정)

3		설계변경 개요

□ 설계변경(2회) 사유

○ 현장 여건에 따른 공사실정보고 사항 반영

- 공사실정 보고(토목과-8749호, 2023.6.30.)

· 보도포장(전폭) 시행(A=2.3a)

- 공사실정 보고(토목과-9737호, 2023.7.20.)

· 노후도로 사후정비(절삭 후 덧씌우기) 시행(A=60.9a)

- 공사실정 보고(토목과-10083호, 2023.7.27.)

· 보도포장(전폭) 시행(A=4.0a)

○ 품질시험비 계상

○ 기타 현장 여건에 따른 공종별 물량 증·감 발생

□ 주요 물량 증·감 현황

구 분	단위	당 초	변 경	증·감
아스팔트포장(기층,표층)	a	115.0	105.0	감) 10.0
보도블록포장(고압블록,화강판석)	a	21.4	28.1	증) 6.7
경계석 및 측구설치	m	75.0	35.0	감) 40.0
노면파쇄공	a	50.0	80.0	증) 30.0
품질시험비	식	-	1.0	증) 1.0

□ 설계변경(2회) 내역

(단위: 원)
구 분	당 초	변 경	증 감	비고
총공사비	*************	*************	*
도 급 비	***********	***********	***************
관 급 비	***********	***********	*
이 전 비	***********	**********	***************

□ 예산과목: 토목과, 지방도 건설 및 확대포장, 도로굴착복구기금 운용, 도로복구, 시설비및부대비, 시설비(구기금)

4		조치계획

□ 상기와 같은 사유로 공종별 변경된 사항에 대해 첨부된 변경설계서(2회)와 같이 설계변경하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함

붙임  1. 변경설계서(2회) 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.

3. 공사실정보고서 3부.

4. 공사계약 원가심사 결과 1부.  끝.