문서번호	급수운영과-15598
보존기간
결재일자	2023. 9. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		급수운영팀장	급수운영과장		강동수도사업소장
김병국		양재덕	이규희		09/20
					유재명
협 조

「가락공동구 대체관로 구축공사」

준공기한 연기 검토보고

2023. 9. 19.(화요일)

강동수도사업소

(급수운영과)

「가락공동구 대체관로 구축공사」

준공기한 연기 검토보고

「가락공동구 대체관로 구축공사」와 관련하여 아래와 같이 서울시설공단으로부터 준공기한 연기요청서가 제출되어 이에 대한 검토 및 조치계획을 보고함

Ⅰ		공사현황

ㅇ 공 사 명: 가락공동구 대체관로 구축공사

ㅇ 공사개요: D=150~300mm, L=600m

ㅇ 공사기간: 2023. 4. 20. ~ 2023. 9. 30.

ㅇ 계약금액: *************

ㅇ 시공사: (주)지승유지스 대표 고효석

ㅇ 감독자: 서울시설공단 공사감독2처 유현석

Ⅱ		준공연기 사유

□ 공정현황

ㅇ 공 정 률: 52.5%(2023년 9월 19일 현재)

ㅇ 완료공정: 시점부 부단수 분기 및 직관부설(310/600m)

ㅇ 잔여공정: 직관부설 및 밸브실, 신설관 세척

□ 추진상 문제점

ㅇ 본 공사는 가락공동구 내에 상수관로를 대체하기 위한 신설 공사로써 공동구 인접공사에 해당됨

ㅇ 전체 공동구 대체관로 공사에 대해 서울시설공단 공동구관리처의 공동구 인접공사 협의요청으로 협의진행함

- 가락공동구 현황자료 협조요청 ('23. 6. 2.)

- 가락공동구 인접공사 초안 검토요청 ('23. 6. 29.)

- 가락공동구 인접공사 검토요청 회신 ('23. 7. 3.)

· 중요공사(A등급)판정: 균열계 및 경사계 설치, 구조검토서 요구

- 계측용역 및 구조안정성 검토용역 발주계획수립, 기술용역 타당성 심사 및 용역 발주('23. 7. 4.~ 8. 10.)

- 계측기 설치 ('23. 8. 17.)

- 공동구 구조물 안정성평가 용역보고('23. 9. 6.)

- 계측관리 계획 및 안정성 검토 결과 제출보고('23. 9. 6.)

ㅇ 공동구 협의 진행으로 착공일 지연 (실착공일 '23. 9. 7.)

□ 공단 검토의견

ㅇ 유관기관의 협의로 인하여 지연된 총 120일 중 시공사가 요청한 준공기한 31일을 연기하여 잔여공종 및 준공처리에 만전을 기함이 타당하다가 판단됨

Ⅲ		사업소 검토의견

ㅇ 서울시설공단 공동구관리처의 공동구 인접공사 협의 요청으로 관련 용역 발주 및 계약 등으로 인한 공사 지연이 발생함

ㅇ 실착공일('23. 9. 7.)을 기준으로 현재까지 공정률 52.5%로 상수관 부설작업을 성실히 진행하고 있으나, 준공일(2023. 9. 30.)에 쫓겨 무리한 작업 일정으로 인한 시공품질저하 방지 및 인부들의 안전사고를 사전에 예방하기 위해서 공시기간 연기를 통한 시공품질확보 및 안전한 공사를 위한 공사연기가 타당하다고 판단 됨

Ⅳ		조치계획

ㅇ 위와 같은 사항으로 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 함

- 당초 : 2023. 4. 20. ~ 2023. 9. 30.

- 변경 : 2023. 4. 20. ~ 2023. 10. 31. (총 31일 연기)

ㅇ 준공기한 변경으로 인한 변경계약을 실시하고 이를 서울시설공단 공사감독2처에 통보하고자 함

붙임 :  준공기한연기보고서 및 사유서 등 각1부.  끝.