아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부도로사업소
수신	원일이앤씨(주)
(경유)
제목	2023년 도로 및 교통안전부속물 유지보수공사(연간단가) 작업지시기간 연장 통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 우리 사업소와 계약 체결하여 시행중인 「2023년 도로 및 교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)」와 관련 아래와 같이 작업지시 기간을 연장통보 하오니, 공사 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

■ 작업지시 기간 연장 현황

1) 2023년 중앙버스전용차로 고강성 콘크리트 포장공사

작업차수	작업기간		연장사유	비고
	당초	변경
4차	*********** ********	*********** *********	병행공사1)일정 변경에 따른 작업지시기한 연장

끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	온지현		도로보수과장	09/20
김순수
협조자
시행	도로보수과-9891	(	2023. 9. 20.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913, 도로보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5438	/전송	02-945-5071	/	onjeehyun@seoul.go.kr	/	부분공개(5)