문서번호	급수운영과-15133
결재일자	2023. 9. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
박상권	최용진	09/21
		송병욱
협 조

사토장 변경 검토 보고

(2023년 도봉노원구관내 상수도시설물)

2023. 09.

북부수도사업소

(급수운영과)

사토장 변경 실정 보고

「2023년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(단가계약)」와 관련 사토장 변경 요청에 대하여 현장 실사 및 검토 후 결과를 보고드림.

※관련근거 : 이준엔지니어링 2023-22(2023.08.31.)호 사토장 변경 실정보고

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 2023년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 설치 및보수공사(단가계약)

□ 공사개요 : 노후밸브교체 135개소, 제수밸브실 정비 139개소

□ 공사개요 : *************************

□ 도 급 비 : ************

□ 도 급 사 : ********************

Ⅱ		현 황

○  당초 사용중이된 사토장 잔토물량 반입이 종료되어, 원활한 잔토처리를 위한 사토장 확보가 필요한 실정임

Ⅲ		검토의견

○ 원활한 잔토처리를 위해 잔토처리가 가능한 사토장으로 위치 변경을 승인코자 함.

- 사토장 변경 위치 : ********************

- 운반거리 : 당초 ********************** 실측거리 28㎞

- 개략공사비 : 27*****************************

Ⅳ		조치계획

○ 상기와 같이 검토결과를 ***********, 이준엔지니어링(주)에게 통보하여 공사시행에 만전을 기하고 추후 설계변경시 반영토록 조치하고자 합니다.

붙임  사토장 실정보고 1부.  끝.