아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	금천구청장(문화체육과장)
(경유)
제목	전통사찰 시설확충 및 정비지원 사업기간 연장 승인 알림

1. 금천구 문화체육과-30333(2023. 9. 16.)호와 관련입니다.

2. 전통사찰 시설확충 및 정비지원 사업과 관련하여 아래와 같이 승인하오니 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

-  아     래  -

가. 승인내용

*****************************************

- 사업기간 연장승인

당 초			변 경
건축설계	공사실시	공사준공	건축설계	공사실시	공사준공
23년 3월~8월	23년 8월~24년 5월	24년 5월	23년 3월~11월	23년 12월~24년 11월	24년 11월

나. 승인조건 : 공사준공일에 맞추어 사업정산 및 결과보고 제출바람.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이인식		종무팀장	김용환		문화정책과장	09/21
전재명
협조자
시행	문화정책과-13518	(	2023. 9. 21.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 세종대로 124, 한국프레스센터 4층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2530	/전송	02-2133-1059	/	lis907@seoul.go.kr	/	부분공개(5)