문서번호	기반시설과-2323
결재일자	2023. 9. 20.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이균휴		이석근	09/20
			이유국
협조

[양화대교북단외 1개소 승강기 설치공사 건설폐기물 처리용역] 설 계 변 경(정산)  검 토 보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 09. 19. (화)

미래한강본부 시설부

(기반시설과)

[양화대교북단외 1개소 승강기 설치공사 건설폐기물 처리용역]

설 계 변 경 (정산)  검 토 보 고

우리 본부에서 추진중인 [양화대교북단외 1개소 승강기 설치공사 건설폐기물 처리용역]관련 공사현장 여건 및 실정보고를 반영하여 설계  변경(정산)하여 용역 준공에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		용 역 개 요

ㅇ 용역명: 양화대교북단외 1개소 승강기 설치공사 건설폐기물 처리용역

ㅇ 위  치: 양화대교북단 및 동호대교남단 승강기 공사 현장

ㅇ 기  간: 2022.7.12.~2023.9.30.(2차:2023.1.5.~2023.9.30.)

ㅇ 용역비: 금34,393천원(2차:금26,194천원)

ㅇ 업체명: 광일토건환경(주)

Ⅱ		설계변경내역

ㅇ 공사 현장 실정보고

- 공사 현장 여건 반영에 따른 물량증감 반영

- 설계물량과 현장 차이 반영

ㅇ 용역 기간변경

- 총차: 변동없음(2022. 7.12.~2023. 9.30.)

- 2 차: 변동없음(2023. 1. 5.~2023. 9.30.)

ㅇ 수량변경

구분	단위	총차수량			2차수량			비고
		당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
폐콘크리트	톤	888	627	감)258	675	417	감)258

ㅇ 용역비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		총 차(원)	2 차(원)	비 고
용 역 비	당 초	34,349,000	26,194,000
	변 경	24,348,000	16,193,000
	증 · 감	감)10,001,000	감)10,001,000

Ⅲ		조 치 의 견

ㅇ 현장상황 및 실정보고 내역을 반영하여 설계변경(정산)하여 용역    준공에 만전을 기하고자 함.

붙임 1) 변경내역서(총차) 1부.

2) 변경내역서(2차) 1부. 끝.