문서번호	자치행정과-16125
결재일자	2023. 9. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	구청장 제362호

주무관		자치행정팀장		자치행정과장	행정관리국장		부구청장		구청장
장유진		이은경		김영규	이현식		유보화		09/21
									정원오
협조
	정책기획관		정종근
	주거정비과장		김평선

용답동 청사건립 예정부지 이전 계획

- 용답동 주택 재개발구역 내 - 용답동 청사건립 예정부지 이전 계획

2023. 9.

【자치행정과】

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 용답동 주택 재개발구역 내 -

용답동 청사건립 예정부지 이전 계획

기존 청사건립 예정부지 내 지하철 출입구·환기구 시설 이설추진에 따라 청사 건립부지 이전을 추진하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 구청장 방침 제222호(‘21.6.9.)“용답동 공공복합청사 건립 추진계획(안)”

□ 성동구공공디자인진흥위원회 심의의견(‘21.6.9.)

Ⅱ		추진방향

□ 보행자 및 공원 이용주민 편의성을 반영한 청사 부지 조정

□ 주변 교통시설 및 청사 이용자 접근성 등 고려

Ⅲ		추진개요

□ 위    치: 용답동 103-9외 필지(대지면적 1,800㎡)

□ 규    모: 850㎡(연면적 4,300㎡)/ 지하 1층, 지상 5층

□ 총사업비: 약 208억 원

Ⅳ		세부 추진계획

□ 이전사유: 지하철 출입구·환기구 기존 청사 예정 부지 내 이설

※ 성동구공공디자인진흥위원회 심의 시 보행환경 개선을 위해 이설 의견제시(’22.6.30.)

기존 청사 예정 부지 기존 설치위치	이설 위치
<당초> 재개발 구역 밖 보도 내 설치	<변경> 재개발 구역 내 청사건립 부지 내 설치

□ 검토결과: 청사건립 예정부지 위치 변경 필요

○ 보행로 확보 등 주민편의를 위해 청사 예정부지 이전 필요

○ 공원조성 위치상 공원 이용주민들의 편의를 위해 우측 하부가 타당

○ 교차로에 위치하여 차량 진·출입 및 접근성 용이

<기존위치>	<변경위치(안)>

※ 청사건립 예정부지 현황

	출입구
<위 치 도>	<부지현황>

Ⅴ		향후 추진계획

□ 주택재개발정비계획 변경요청 ····································· 2023. 10.

□ 청사 위탁개발 관련 수탁기관 협의 ···························· 2023. 11.

□ 사전절차 이행(투자심사 등) ····················· 2023. 12. ~ 2024. 2.

□ 기본 및 실시설계 진행 ················································ 2024. 8.

□ 공공복합청사 공사 착공 ··············································· 2025. 4.

□ 공공복합청사 공사 준공 ············································· 2026. 10.

Ⅵ		협조사항

□ 청사 예정부지 반영한 주택재개발정비계획 변경 협의 ···· 주거정비과

붙임 : 위치변경(안) 1부.  끝.