현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
	성 북 구
수신	내부결재
(경유)
제목	돌곶이로105 주변 외 3개소 하수관로 개량공사 설계변경(최종) 시행

우리 구에서 시행중인「돌곶이로105 주변 외 3개소 하수관로 개량공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회, 최종)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 돌곶이로105 주변 외 3개소 하수관로 개량공사

2. 공사기간 : 2023. 4. 13. ~ 2023. 10. 9.

3. 도 급 자 : 그레이스종합건설㈜ 대표 김영재

4. 설계변경 내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감		비 고
총 공사비	702,032,500	701,796,180	감)	236,320
도 급 비	423,322,500	437,828,000	증)	14,505,500
관 급 비	92,870,000	78,128,180	감)	14,741,820
이 전 비	185,840,000	185,840,000		-

5. 설계변경 사유 : 현장여건 변경에 따른 시공물량 증·감

6. 예산과목
- 치수과, 하천 및 하수시설 정비, 하수시설 개량 확충, 하수관 개량공사, 시설비및부대비

붙  임   1. 설계변경 사유서 1부.
2. 설계변경 내역서 1부.
3. 제비율검증확인서 1부.
4. 관련 방침서 1부.  끝.

주무관	김동오		하수담당	김정훈		치수과장	김윤기		건설교통국장	09/21
代송재진
협조자	계약담당	조은숙		재무과장	代김미경
시행	치수과-16368	(	2023. 9. 21.	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-3634	/전송	02-2241-6563	/	kimdo11@sb.go.kr	/	부분공개(5)