아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계변경 및 변경계약 요청(한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리용역)

우리 부서에서 시행중인「한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리-2차」용역과 관련하여 아래와 같이 설계변경 및 변경계약 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 계약건명 : 2022년 한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리 용역-2차

2) 계약일자 : 2022. 12. 28.

3) 준공기한 : 2023. 12. 31.

4) 계약상대자 : 주식회사 유신

나 설계변경 현황

(단위 :원)

구 분	도 급 액		용역기간	비 고
	당 초	변 경
전체분(3차)	*************	*************	2022.1.1.~2024.12.31.
2차분(1회)	***********	***********	2023.1.1.~2023.12.31.

다. 설계변경 사유

- 시스템 유지관리를 위한 추가과업 발생 및 시스템 확장을 위한 프로그램 개발

라. 예산과목 : 재난안전관리실 교량안전과, 재해 및 재난 예방, 재난 예방 및 복구, 재난예방(재난관리기금 재난계정), 시설비및부대비, 시설비(예산편성부서 : 재난안전관리실 재난안전정책과)

붙임 1. 방침서 1부.

2. 변경설계서 1부.

3. 변경내역서 1부.

4. 합의각서 1부.

5. 설계변경 사유서 1부.  끝.

	교 량 안 전 과 장
주무관	나용수		특수교량팀장	김귀용		교량안전과장	09/21
조현석
협조자	계약2팀장	이태영
시행	교량안전과-5070	(	2023. 9. 21.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 11층 교량안전과 (태평로1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-1956	/전송	02-2133-1429	/	ysna76@seoul.go.kr	/	부분공개(7)