아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	총무과장
(경유)
제목	건설폐기물처리용역 설계변경 시행 및 계약의뢰(양화대교북단외 1개소 승강기 설치공사)

우리본부에서 추진중인 『양화대교북단외 1개소 승강기 설치공사 건설폐기물 처리용역』관련 다음과 같이 설계변경(정산)하오니 조치바랍니다

가.용역명: 양화대교북단외 1개소 승강기 설치공사 건설폐기물 처리용역

나.용역기간

-총차:2022.7.12.~2023.9.30.(2차: 2023.1.5.~2023.9.30.)

다.계약금액

-총차:금34,349,000원(2차:금26,194,000원)

라.업체명: 광일토건환경(주)

마.변경내역

-기간변경 : 변경없음

-금액변경

구 분	총 차	2 차	비 고
당 초	34,349,000	26,194,000
변 경	24,348,000	16,193,000
증 • 감	10,001,000	10,001,000

바.변경사유: 현장여건에 따른 폐기물 증•감 사항반영(정산)

붙임  1. 방침서(용역) 1부.

2. 변경내역서(용역총차,2차) 1부.

3. 합의각서(용역총차,2차)  1부.

	시 설 부 장
주무관	이균휴		기반시설과장	이석근		시설부장	09/21
이유국
협조자	주무관	이준용		기획예산과장	이강수
시행	기반시설과-2385	(	2023. 9. 21.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 기반시설과	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0676	/전송	02-3780-0744	/	gyunhyu123@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)