아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(서울창포원 재조성 기본 및 실시설계 용역)

1. 공원조성과-11390(2023.9.21.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인『서울창포원 재조성 기본 및 실시설계 용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 서울창포원 재조성 기본 및 실시설계 용역

*************************

*************************************

라. 계약년월일: 2022.12.1.

마. 변경사항

계약금액	당 초	*************************
	변경후	계약금액 변경 없음
계약기간	당 초	2022 .12. 1. ~ 2023. 9. 30.
	변경후	2022. 12. 1. ~ 2023.12. 26.

※ 예산과목: 공원여가정책과, 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선, 공원 유지관리 및 이용활성화, 시공원 유지관리 및 보수정비, 시설비 및 부대비, 시설비(205-401-01)

바. ******************************

******************************************************************************************************************

붙임  1. 관련 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서  1부.  끝.

	공 원 조 성 과 장
담당사무관	임록화		공원개발팀장	代임록화		공원조성과장	09/21
박미애
협조자
시행	공원조성과-11396	(	2023. 9. 21.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 10층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-7816	/전송	02-2133-0894	/	hungreen@seoul.go.kr	/	부분공개(5)