문서번호	정수시설과-3055
결재일자	2023. 9. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
손영일	최병희	09/22
		윤준성
협 조
	주무관		최경민

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

[관리본관 폐쇄형배전반 제작구매 설치] 설계변경(정산) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 09.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

[관리본관 폐쇄형배전반 제작구매 설치]

설계변경(정산) 검토 보고

「관리본반 폐쇄형배전반 제작구매 설치」시행중 보험료 정산사항과  관련한 설계변경 사항에 대하여 보고드림.

□ 관련 근거

○ ******************************

***********************************

□ 사업 개요

○ 사 업 명: 관리본관 폐쇄형배전반 제작구매 설치

○ 계약기간: 2023. 06. 16. ~ 2023. 10. 14.

○ 공사내용: 고압반 2면, 변압기반 2면, 저압반 5면, 전동기반 2면

○ 계약금액: ************

○ 감 리 사: *********

○ 계 약 자: **********

□ 설계변경 내용(감리원 검토사항)

○ 보험료(산재,고용) 및 산업안전보건관리비 정산

○ 주요 변경 내역

(단위: 원)

구 분	주요 내역	증·감액
경 비	산재보험료	************
	고용보험료	*************
	산업안전보건관리비	************
일반관리비		************
이 윤		************
부가가치세		************
총 계		************

○ 계약금액 변경

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감액
공 급 가 액	***********	***********	*************
부가 가치세	**********	**********	************
총 사 업 비	***********	***********	************

□ 보고자 의견

○ 산업안전보건관리비, 보험료 및 제경비 변경에 따른 설계변경  정산 시행

※ 물량 증감 및 신규 공종 발생에 따른 설계변경이 아니므로 설계변경 심의위원회는 생략

○ 변경 금액으로 재계약 후 최종 납품처리

붙임 1. 감리검토 보고서 1부.

2. 정산내역서,합의각서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부. 끝.