문서번호	치수과-2531
결재일자	2023. 9. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
박지수		김창신	09/22
			이유국
협 조

- 2023년 한강 취수장 주변 준설공사 -

실정보고에 대한 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 8.

미래한강본부

(시설부)

- 2023년 한강 취수장 주변 준설공사 -

실정보고에 대한 검토 보고

「2023년 한강 취수장 주변 준설공사」관련 건설사업관리자 실정보고 사항(착공전 수심측량 결과)에 대하여 검토하여 처리계획을 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 한강 취수장 주변 준설공사

ㅇ 위    치 : 한강 잠실수중보 상류(취수장 주변)

ㅇ 공사기간 : '23. 8. 21. ~ '23. 12. 31.

ㅇ 공사규모 : 준설 및 반출 23,480㎥

- 자양 1,300㎥, 일산 500㎥, 풍납 15,580㎥, 성남 5,900㎥, 강북 200㎥

ㅇ 계약금액 : 1,308,527천원

ㅇ 시 공 사 : 유호산업개발(주) 대표 유정환

ㅇ 감 리 사 : ㈜이준엔지니어링 외 1개사 대표 김정대

□ 추진경위

ㅇ '23.  8. 17. : 공사계약

ㅇ '23.  8. 21. : 공사착수

ㅇ '23.  9.7 ~ 9.11 : 수심측량

ㅇ '23.  9. 14. : 착공전 수심측량 결과 제출(시공사→건설사업관리단)

ㅇ '23.  9. 15. : 검토의견서 제출(건설사업관리단→치수과)

□ 보고내용

ㅇ 설계측량 오차 및 하상 변동에 따른 준설량 증가

구 분	준설면적(㎡)	준설계획고	준설량(㎥)		증·감
			설계	측량결과
합 계	74,100		23,480	41,130	증)	17,650
자양취수장	6,800	-5.30m	1,300	1,300		-
일산취수장	5,000	-5.21m	500	500		-
풍납취수장	37,900	-5.17m	15,580	31,700	증)	16,120
성남취수장	20,000	-5.06m	5,900	7,300	증)	1,400
강북취수장	4,400	-3.14m	200	330	증)	130

※ 준설계획수심은 한강 수로조사용역 측점별 계획하상고(200cms) 적용

ㅇ 안정적인 상수원 확보와 수질개선을 위해 추가 준설 필요

□ 조치계획

ㅇ 상수원의 유수소통 및 수질개선을 위해 실정보고 사항을 반영하여 예산범위 내에서 우선 작업지시

- 준설량 : (당초) 23,480㎥ → (변경) 28,000㎥

▸ 추가 준설 4,520㎥(풍납 2,990㎥, 성남 1,400㎥, 강북130㎥)

- 추가 준설공사 시행에 따른 소요예산은 본 공사 낙찰차액 등을 활용

ㅇ 사업예산 부족으로 본 공사에서 제외된 준설량은 '24년 국비 확보하여 공사추진

- 소요예산 : 1,300백만원(한강수계관리기금)

□ 행정사항

ㅇ 작업지시 통보(치수과→건설사업관리단)

ㅇ 물량 증‧감 사항을 반영하여 추후 설계변경 시행

붙임 : 착공전 수심측량 결과 1부.  끝.