문서번호	기전과-11240
결재일자
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김성균		최경주	09/25 최연우
협 조
	주무관			정영술

「남산2호터널 비상경보설비 교체공사」

준공검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  9.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「남산2호터널 비상경보설비 교체공사」

준공검사 결과보고

터널 내 노후된 옥내소화전 외함 및 비상경보설비 등을 교체하여 안전한 소방관리체계를 유지하고자 추진한 본 공사의 준공검사 결과 보고드림.

1		관련 근거

□「기전과-3525(2023.4.6.)」: 사업추진 계획보고

□**************************: 준공계 접수

2		사업 개요

□ 사 업 명 : 남산2호터널 비상경보설비 교체공사

□ 위    치 : 남산2호터널(장충동 ↔ 이태원동)

□ 사업목적 : 노후 소방시설물(소화전함, 비상경보설비 등) 교체하여 터널 내 안전한 소방관리체계 유지

□ 계약금액 : *************************

- *******************************

□ 준공금액 : 상동

□ 계약기간 : 2023. 05. 24. ~ 09. 22. (착공일 : 2023. 06. 01.)

□ 준 공 일 : 2023. 09. 20.

□ 준공검사일 : 2023. 09. 25.

□ 계약상대자 : *********************

- 계약방법 : 전자공개 수의계약(수의 2인이상 견적)

□ 사업규모

- 비상경보설비 세트 교체(36세트)

·발신기, 소화기, 비상콘센트, 화재수신 중계기 포함

- 옥내소화전함 외함 교체(36개) : 매입형(1200 × 1200)

·철제면 청소 및 도장 포함

- 기타 공사

·앵글밸브 교체에 따른 보온재 설치

·소화전 배관 열선 누전차단기 설치

□ 검사내용

- 시공현장 : 자재 규격·수량·외관 상태 확인, 위치 및 공종 별 시공상태 확인, 시험 가동 확인, 마무리 시공 및 현장정리 상태 확인 등

- 준공서류 : 준공내역서, 사진대지, 도면, 4대보험 완납 증명서, 국세·지방세 납세 증명서, 산업안전보건관리비 사용내역 등 확인

3		검토 의견

준공 검사 결과

□ 현장 검사 결과 이상 없음

□ 계약상대자가 제출한 준공서류 검토 결과 이상 없음

□ 준공 전 설계변경 시행 및 정산 완료

종합 의견

□ 준공 검사 결과 사업 목적에 맞게 적절히 시공을 완료하였기에 제출한 준공서류를 바탕으로 준공처리하고자 함.

4		행정 사항

□ 준공검사조서 제출( → 관리단속과)

붙임  1. 준공계 1부.

2. 준공내역서 1부.

3. 준공도면 1부.

4. 준공사진대지 1부.  끝.