문서번호	기전설비과-2566
결재일자	2023. 9. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
조광호		김진보	09/25
			이유국
협조	주무관		허준혁
	주무관		김준혁

잠실나루역 승강기 교체관련 부대공사 추진계획

2023. 9.

시 설 부

(기전설비과)

잠실나루역 승강기 교체관련 부대공사 추진계획
시설부장 : 이유국 ☎3780-0830	기전설비과장 : 김진보 ☎0669	담당 : 조광호 ☎0670

잠실나루역 승강기 교체관련 전기·통신 및 승강장 마감공사 등 부대공사 추진계획을 다음과 같이 보고드림.

□ 사업개요

○ 교체대상 : 잠실나루역 보행육교 승강기

○ 사업기간 : 2023. 8. ~ 11.

○ 사업내용 : 승객용엘리베이터(15인승) 1대 철거설치 및 부대공사

○ 소요예산 : **********************************

○ 추진현황 : 승강기 구매설치 계약완료 및 공장 제작 중

- 승강기 구매설치(철거포함) 계약현황

**********************************************************************************************************

※ 납품기한 120일이나 한강공원 이용객의 편의성을 위해 11월말 개통 목표로 추진

□ 부대공사

○ 공사목적 : 다수공급자계약 추가선택품목에 없는 사항으로 승강기 안전기준 충족 및 향후 효율적 승강기 유지관리를 위해 별도 추진

○ 주요내용

- (전원공사) 노후된 UPS 철거 및 간선 전력케이블 재시공

UPS(Uninterruptible Power Supply) 비상전원장치로 정전시 승강기에 일정시간동안 전원을 투입하는 장치이나, 2017년 1월부터 신규설치 승강기에 대한 ARD 장착이 의무화되면서 UPS의 필요성이 없어짐

2) ARD(Auto Rescue Device) 정전 등으로 엘리베이터의 운행이 멈추거나 정상적이지 않은 위치에서 정지된 경우 제어반에 전원을 공급하여 가까운 층으로 카를 운행시켜 도어를 개방하는 비상구출운전장치

- (통신공사) 승강기 카 내부 CCTV 재설치(1대) 및 보행육교 방범 사각지대 CCTV 신규설치(3대)

- (부대공사) 승강로 상부 구조빔 재설치 및 승강장 주변 재시공 등

□ 발주계획

○ 전기공사

- 건    명 : 잠실나루역 승강기 전원 개선공사

- 발주방법 : ******************

- 대상업체 : **************

- 주요내용 : UPS철거 및 승강기 전원 간선케이블 30m 재시공

- 소요금액 : ***********

○ 통신공사

- 건    명 : 잠실나루역 승강기 CCTV 구매설치

- 발주방법 : *********************

- 대상업체 : *************

- 주요내용 : 카 내부 CCTV 재설치(1대) 및 보행육교 CCTV 신규설치(3대)

- 소요금액 : ************

○ 부대공사

- 건    명 : 잠실나루역 승강기 교체 부대공사

- 발주방법 : *********************

- 대상업체 : ***************

************************************************

- 주요내용 : 승강로 상부 구조빔 재설치 및 부분 도장, 승강장 바닥 및 상부 재시공, 승강장 조명 설치 등

- 소요금액 : ************

□ 추진일정

○ '23.  8. 28.  특정제품(승객용엘리베이터) 선정심사

○ '23.  8. 31.  승강기 구매설치 조달계약 의뢰

○ '23. 10. 10.  전기·통신 및 부대공사 계약의뢰

○ '23. 10. 25.  승강기 철거 및 부대공사 착공(시민 이용 통제)

○ '23. 11. 30.  승강기 설치완료 및 개통

붙임  1. 주요 부대공사 현장사진 및 내용 1부.

2. 예정공정표 1부.

3. 설계내역서(전기공사) 1부.

4. 설계내역서(통신공사) 1부.

5. 설계내역서(부대공사) 1부.  끝.