문서번호	기전과-11236
결재일자	2023. 9. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
곽영두	09/25
	최경주

- 남산2호터널 풍도 전기설비 개량공사 -

실정보고 검토 및 추가작업 계획

2023. 9.

서부도로사업소

(기전과)

- 남산2호터널 풍도 전기설비 개량공사 -

실정보고 검토 및 추가작업 계획

감독대행기관의 실정보고를 검토하고, 2호터널 사고감지장비 설치 관련 추가작업 지시사항을 검토하여 아래와 같이 보고함

□ 관련근거

ㅇ 실정보고서 1회 제출(서울시설공단 공사감독3처-7417, 2023.9.18.)

ㅇ 남산2,3호터널 레이저 기반 3-MIX 설비 제작구매설치 계약체결

(기전과-8205,2023.7.31.)

□ 공사 개요

ㅇ 공 사 명: 남산2호터널 풍도 전기설비 개량공사

ㅇ 계약금액: 금301,574,000원

ㅇ 계약업체: 유한회사 새빛전력 (대표 김일주)

ㅇ 공사기간: 2023. 5. 17. ~ 2023. 10. 13.

ㅇ 주요공정: 풍도조명 설치, 트레이 내 조명케이블 교체

**********

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*******************

********

****************************************

****************************************************************************************************************************************************************

***********************************

************************************

******************

***********************************

**********************

□ 개략공사비

구분	당초(원)	변경(원)	증감액(원)
공급가액	274,158,182	285,568,838	증) 11,410,656
부가세	27,415,818	28,556,883	증) 1,141,065
도급비계	301,574,000	314,125,720	증) 12,551,720 (약 5% 증액)

※ 제경비 정산, 기타 여건에 따라 다소 변동 가능

□ 향후계획

ㅇ 2023. 9. : 추가 작업지시 및 준공기한 연장

ㅇ 2023. 10. 31. : 공사 준공.

붙임  1. 실정보고 및 실정보고 검토 1부.
2. 남산2호터널 사고감지장비 위치도 1부.  끝.