문서번호	정수시설과-8090
결재일자	2023. 9. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
정상수		정인영	09/25
			서한호
협조
	주무관		장현순

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

「뚝도정수지(2호지) 내부방식공사」

2023. 9.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

「뚝도정수지(2호지) 내부방식공사」

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

뚝도정수지(2호지) 내부방식공사』시행 중 신규공종 발생 및 공사물량 변경사항이 발생 됨에 따라 설계변경 심의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

▢ 심의개요

○ 심의일시 : 2023. 9. 25(월) 10:30

○ 심의장소 : 뚝도아리수정수센터 정수시설과

○ 위원구성

- 위원장 : ******

- 위  원 : **********************************

▢ 설계변경 내용

공 종	규 격	단위	수 량						비고
			총차분			1차분
			당초	변 경	증.감	당초	변 경	증.감
**************	**	*		*****	******		*****	******	신규
***	**	*	*	*****	******	*	*****	******	신규
****	*****	*	*	**	***	*	**	***	신규
*******	******	*	*	****	*****	*	****	*****	신규
*********	******	**		****	*****		****	*****	신규
***		*	*	*****	******	*	*****	******	신규
*********	**	***	***	***	****	***	***	****
************	******	***	***	***	****	***	***	****
**********	*****	**	***	***	***	**	**	***
***********		***	***	***	****	***	***	****
*********		***	***	***	****	***	***	****

공 종	공사비						비고
	총차 분			2차 분
	당 초	변 경	증.감	당 초	변 경	증.감
****	2,175,850,000	2,204,730,000	28,880,000	1,284,940,909	1,313,820,909	28,880,000
*****	217,585,000	220,473,000	2,888,000	128,494,091	131,382,091	2,888,000
*****	2,393,435,000	2,425,203,000	31,768,000	1,413,435,000	1,445,203,000	31,768,000

▢ 심의결과

○ ****************

○ ****************

○ ***************************

○ ***********************

○ ******************************

▢ 행정사항

○ 심의 결과에 의거 설계변경 시행 및 행정관리과에 변경계약 의뢰

붙 임 : 1. 설계변경 검토 의견서 1부

2. 설계변경 내역서 2부.  끝.