아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	서울특별시중구청장(도로시설과장)
(경유)
제목	도로굴착 기간 연장 요청

우리 사업소에서 시행하는 「2023년 중구 관내 상수도 공사」 관련 단수, 식당 영업 및 교통 협의 등 원인으로 아래와 같이 공사 일정이 지연되어 도로굴착 기간 연장을 요청합니다.

연번	허가번호	주소	연장 요청기간	연장사유
1	중구-2023-상수-00067	********	2023.10.1. ~ 11.20.	주변 민원 문제로 작업지연
2	중구-2023-상수-00119	*********	2023.10.1. ~ 11.20.	주변 민원 문제로 작업지연
3	중구-2023-상수-00128	***********	2023.10.1. ~ 11.20.	주변 민원 문제로 작업지연
4	중구-2023-상수-00126	************	2023.10.1. ~ 11.20.	주변 민원 문제로 작업지연
5	중구-2023-상수-00108	******	2023.10.1. ~ 11.20.	주변 민원 문제로 작업지연
6	중구-2023-상수-00127	*********	2023.10.1. ~ 11.20.	주변 민원 문제로 작업지연
7	중구-2023-상수-00126	*********	2023.10.1. ~ 11.20.	주변 민원 문제로 작업지연
8	중구-2032-상수-00124	*********	2023.10.1. ~ 11.20.	주변 민원 문제로 작업지연
9	중구-2023-상수-00110	*********	2023.10.1. ~ 11.20.	주변 민원 문제로 작업지연
10	중구-2023-상수-00107	******	2023.10.1. ~ 11.20.	주변 민원 문제로 작업지연
11	중구-2023-상수-00097	*******	2023.10.1. ~ 11.20.	주변 민원 문제로 작업지연
12	중구-2023-상수-00056	********	2023.10.1. ~ 11.20.	주변 민원 문제로 작업지연
13	중구-2023-상수-00055	*********	2023.10.1. ~ 11.20.	주변 민원 문제로 작업지연
14	중구-2023-상수-00060	***********	2023.10.1. ~ 11.20.	주변 민원 문제로 작업지연

끝.

	중부수도사업소장
주무관	김보성		급수관리팀장	김종수		급수운영과장	09/26
김상웅
협조자
시행	급수운영과-17810	(	2023. 9. 26.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, (장충동2가) 중부수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2159	/전송	02-3146-2189	/	kdg7096@seoul.go.kr	/	부분공개(6)