아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강북아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	용역기한 연장 의뢰[폐쇄형배전반 및 전력케이블 교체 전기감리]

1. 정수시설과-3086(2023.09.25.)호 관련입니다.

2. 우리 정수센터에서 시행중인 아래 사업에 대하여 용역기한 연장을 의뢰코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명: 폐쇄형배전반 및 전력케이블 교체 전기감리

나. 계약기간: 2023.06.07. ~ 2023.10.06.

다. 계약내용: 폐쇄형배전반(관리본관,여과지동1,2계열) 및 전력케이블 교체 전기감리

라. 계약금액: ****************************

마. 계 약 자: ***************

바. 용역기한

- 당 초: 2023. 10. 06.

- 변 경: 2023. 10. 14.

사. 연기사유: 폐쇄형배전반 교체후(10.06.), 납품검사 및 동작시험 기간 필요

아. 지체상금 부과여부: 미부과

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 합의각서 및 연장요청 공문 각 1부. 끝.

	정 수 시 설 과 장
주무관	손영일		정수시설과장	09/25
최병희
협조자
시행	정수시설과-3087	(	2023. 9. 25.	)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5822	/전송	02-3146-5807	/	zerone@seoul.go.kr	/	부분공개(7)