문서번호	정수시설과-3086
결재일자	2023. 9. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
손영일		최병희	09/25
			윤준성
협조
	주무관		황여진

『폐쇄형배전반 및 전력케이블 전기감리』 용역기한 연장계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 09.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

『폐쇄형배전반 및 전력케이블 교체 전기감리』

용역기한 연기 검토 보고

『폐쇄형배전반 및 전력케이블 교체 전기감리』의 용역기한 연기 요청이 계약상대자로부터 접수되어 해당사항에 대해  검토하고  결과를 보고드림.

Ⅰ		계약현황

□ 용 역 명 : 폐쇄형배전반 및 전력케이블 교체 전기감리

□ 용역대상 :

○ 폐쇄형배전반(관리본관,여과지동1·2계열) 교체 및 부대공사

○ 고압모터전력케이블(송수 및 회수펌프) 교체

□ 계약일자 :  2023.06.07.

□ 용역기간 :  2023.06.09.~2023.10.06.

*********************

**************************

Ⅱ		추진사항

□ 고압모터펌프 전력케이블 교체공사(완료)                [단위:천원]

착공일	준공일	준공검사일	준공금액
6.12.	8.18.	8.23.	271,100

□ 폐쇄형배전반 교체(진행중)                             [단위:천원]

계약건	착수일	제작승인	공장검수	현장설치	계약금액
여과지 배전반	6.27.	7.28.	9.15.	9.22.	373,536
여과지 MCC반	6.15.	8.07.	9.01.	9.12.~13.	132,137
관리본관 배전반	10.14.	8.03.	9.20.	10.5~6.	363,200

Ⅱ		납품기한 연장 검토

□ 용역기한 연장 요청(감리업체)

○ 관리본관 폐쇄형배전반 교체일정이 10.05.~10.06.로 계획되어 있고        본 감리용역 준공기한이 10.06.까지로 배전반 교체후 동작시험 및         검수시간이 소요됨을 감안, 용역기간 연장이 필요함.

□ 용역 준공기한 연장

○ 당 초 : 2023. 10. 06.

○ 변 경 : 2023. 10. 14.

□ 용역기한 연장 검토의견(담당자)

○ 관리본관의 실제 납품일이 10.06.로 계획되어 있고, 전기감리용역의        준공일이 같은 날로 검수기간이 필요하다는 감리업체의 요청사항에        대해, 용역기한을 연기하는 것이 적절하다고 사료됨.

□ 연기사유 귀책소재 : 강북아리수정수센터

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		향후계획

□ 폐쇄형배전반(관리본관, 여과지동) 납품완료 처리

붙임 : 연장요청 공문 및 합의각서 1부. 끝.