문서번호	정수시설과-10473
결재일자	2023. 9. 25.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장
이진성	전결 09/25
	전훈
협 조
	행정관리과장		최재욱
	주무관		김규한

『섬유상여과기 설치를 위한 기본 및 실시설계 용역』

납품기한 연장에 따른 계약변경 검토 보고

2023. 9.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『섬유상여과기 설치를 위한 기본 및 실시설계 용역』

납품기한 연장에 따른 계약변경 검토 보고

정수시설과장 : 전 훈☎3146-5770         담당 : 이진성☎5772

우리 정수센터에서 시행 중인「섬유상여과기 설치를 위한 기본 및 실시설계

용역」의 납품기한 연장에 따른 계약변경 검토결과를 보고 드림.

1		개 요

○ 사 업 명: 암사아리수정수센터 섬유상여과기 설치를 위한 기본 및 실시설계 용역

사업목적	***	*******	완수기한
배출수처리 섬유상여과기를 설치하여 수질기준 관련규정에 적합하게 배출수 수질을 안정적으로 유지코자 함.	***** ********	**********	'23. 9. 29.

2		내 용

○ 관련근거

- 행정안전부예규 제252호(2023. 7. 1.)「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」

- *****************************************

- 정수시설과-4410(2023. 4. 24.)「설계용역 시행계획 보고」

※ 관련법령

행정안전부예규 제252호(2023. 7. 1.) 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제9장 계약일반조건

제8절 계약이행의 지체와 계약의 해제 ․  해지(중략)

1. 지연배상금(중략)

다. 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 공사‧용역‧물품이 지체되었다고 인정할 때에는

그 해당일수를(중략) 지체일수에 산입하지 아니한다. (중략)

8) 그밖에 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우(중략)

2. 계약기간의 연장(중략)

나. 계약담당자는 “가”에 따른 계약기간 연장 신청이 접수된 때에는(중략) 계약기간의 연장 등

필요한 조치를 해야 한다.

다. 계약담당자는“가”에 따른 연장청구를 승인한 경우에는 그 연장기간에 대하여는 “1”에 따른

지연배상금을 부과해서는 아니 된다.

○ *******

- ******************************************* *********************************

- ******************************************** ********************************* *****************

○ 변경내역

사업명	***	****		**
		**	**
섬유상여과기 설치를 위한 기본 및 실시설계 용역	***** ********	***********	************ ********	********** *************

3		검 토 의 견

○ 관련법령에 의거 납품기한 연장 사유를 검토한 바, 적정하다고 판단되기에 연장

내용을 승인하여 용역 품질 및 신뢰도 있는 성과물 확보에 만전을 기하고자 함.

4		행 정 사 항

○ 계약변경 업무추진: 행정관리과

붙 임  1. 관련공문 및 방침(계약변경 요청, 설계용역 시행계획 보고) 각 1부.

2. (당초)계약서 1부.  끝.