문서번호	기전과-11344
결재일자	2023. 9. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
곽영두	09/26
	최경주

- 퇴계로지하차도 외 1개소 진입차단시설 전기공사 -

실정보고 검토 보고

2023. 9.

서부도로사업소

(기전과)

- 퇴계로지하차도 외 1개소 진입차단시설 전기공사 -

실정보고 검토 보고

퇴계로지하차도 기초 굴착공사 지연으로 인한 공기 연장 관련실정보고를 검토하고 아래와 보고함

□ 관련근거

ㅇ 실정보고 1회 제출(에바다 23-0925, 2023.9.25.)

□ 공사 개요

ㅇ 공 사 명: 퇴계로지하차도 외 1개소 진입차단시설 전기공사

ㅇ 계약금액: 금221,519,250원(금이억이천일백오십일만구천이백오십원)

ㅇ 계약업체: 에바다일렉컴 주식회사 (대표 손형관)

ㅇ 공사기간: 2023. 9.11. ~ 2023. 10. 5.

ㅇ 주요공정: 전력/통신 배선 및 배관, 장비 연결 등 부대 전기공사

ㅇ 추진경위

- 2023. 9. 19. : 모래내지하차도 기초공사 완료

- 2023. 9. 20. : 모래내 및 퇴계로 배관배선 작업 완료

□ 실정보고사항

도급업체 실정보고사항	발주처 검토사항
퇴계로지하차도의 기초 굴착공사를 경찰이 추석 전 불허함에 따라 기초 공사 작업에 부대한 전기공사 공종 실행 불가로 기간 연장 필요	기초 굴착 및 차단시설 설치공사와 원활히 일정 조율하며 준공하기 위해 11.15.까지 계약기안을 연장하고자 함

□ 향후계획

ㅇ 2023. 9. : 추가 작업지시 및 준공기한 연장

ㅇ 2023. 10. ~ 11. : 공사 준공

붙임  실정보고  1부.  끝.