문서번호	도시철도설비부-9623
결재일자	2023. 9. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장	도시철도국장 직무대리
박서영	배광희	전계목	09/26
			이승석
협 조
	위례선과장		최이영
	건축공사과장		김광기
	송변전과장		문학준
	시설전기과장		박시현
	설비계획과장		장석춘
	정보통신과장		김이곤
	신호과장		조준규

서울시-철기연 MOU 후속 추진현황 보고

2023. 09.

도시철도설비부

(차량과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

『위례선(트램) 도시철도 건설사업』

서울시&철기연 MOU 후속 추진현황 보고

도시철도설비부장 : 전계목☎6438-2708 차량과장 : 배광희☎2730 담당 : 박서영☎2735

’23.03. 서울시와 철기연의 위례선(트램) 업무협약(MOU)에 따른 협력방안 1단계로 실시설계도서에 대한 철기연 자문 및 조치방안을 보고드림

□ 사업 개요

ㅇ 사 업 명 : 위례선 도시철도 건설사업(T/K)

ㅇ 규    모 : 연장 5.4km, 정거장 12개소, 차량기지 1개소

ㅇ 공사기간 : ’21.12. ~ ’25.09. / ㅇ 총사업비 : 2,614억원

◆ 차량형식 : 무가선트램(배터리지붕탑재)

◆ 편 성 수 : 10편성/50모듈

◆ 계약금액 : 380억원

◆ 제 작 사 : ㈜우진산전

□ 추진 현황

ㅇ ’23.03.08. : 서울市-한국철도기술연구원 업무협약(MOU) 체결 (시장&원장)

- 위례선의 성공적 개통을 위한 제도적·기술적 상호 협력(개통 후 1년)

ㅇ ’23.04.25. : 업무협약에 따른 협력방안 마련 회의 개최

- 위례선 건설공사 단계별 기술 자문 등 협력 사항 검토

- 참석자 : (서울시)차량과장 외 3명, (철기연)차세대철도차량본부장 외 4명

ㅇ ’23.05.08. : 업무협약 관련 협력 추진계획 방침 수립

- 단계별 기술 협력 및 제도개선 사항 마련

· (1단계) 설계도서 (2단계) 시공 (3단계) 철도종합시험운행 (4단계) 개통·운영

ㅇ ’23.06.26. : 한국철도기술연구원 자문의견 접수

ㅇ ’23.07.31. : 담당부서 답변 검토 요청(도철설비부→도철사업부·건축부)

- ’23.08.08.~10. : 각 담당부서 검토결과 회신

□ 1단계 : 설계도서 검토

ㅇ 자문의견 총 18건

	***	***	***	***	***	***	***	***
****	**	*	*	*	*	*	*	*
****	**	*	*	*	*	*	*	*
***	*	*	*	*	*	*	*	*
***	*	*	*	*	*	*	*	*

ㅇ 검토 및 답변 주요내용

***	****	****	***
* ****	************ *********	****************** ***************** ****************** ***************************	***
* ****	******************** ****************** *******	********** ****************************************
* ****	*************** ***************	****************** ************** ******************
* ****	*************** *********	***************** ******************
* ****	****************** *****************	************************************
* ****	********************* ********************	********************* **************
* ****	************************* ****************************	******************** ******************
* ****	******************* ********************	********************** ******************* **********
* ****	************* *******	*************** ************
** ****	****************************	****************** ****************

***	****	****	***
** ****	*************** *****************	**************** *************** *******	***
** ****	************	********************* *************** *******************
** ****	****************************************	***************** *************** **************** *********
** ****	************************************************************	**************** ****************** ***************** ******************
** ****	*********************************** ********************************	************************************************* *****************************************************	***
** ****		************************************************* *****************************************************
** ****	***********************************************************	********************* **************** ***************** ***************
** ****	******************	**************** *************** ******************

※ 검토중 및 미반영 사항은 운영사와 협의 및 시공단계에서 철기연 2단계 자문 예정

□ 향후계획

ㅇ ’23.09.~ ’25.02. : [2단계] 시공방안 검토

- 총 괄 : 도시기반시설본부 도시철도설비부(송변전과)

- 범 위 : 토목, 건축, 설비분야 전반

- 내 용 : 시공단계 현안사항 점검 및 자문요청 후 자문내용 검토

ㅇ ’25.03.~ ’26.09. : [3·4단계] 종합시험운행 ~ 개통 후 1년간 시설   점검 및 제도검토 자문

[총괄 : 도시철도설비부(신호과 ~ 차량과)]

붙임  1. 실시설계도서 자문의견 및 답변내용 1부.

2. 실무협의체 구성 1부.  끝.