문서번호	수변감성도시과-13052
결재일자	2023. 9. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	물순환시설팀장	수변감성도시과장	물순환안전국장
신동인	이승우	박홍봉	09/26
			임창수

『뚝섬유수지 CSOs 저류조 설치사업 기본 및 실시설계』

건설사업관리(설계단계) 용역 추진계획

2023. 9.

물순환안전국

(수변감성도시과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『뚝섬유수지 CSOs 저류조 설치사업 기본 및 실시설계』

건설사업관리(설계단계) 용역 추진계획

뚝섬유수지 CSOs 저류조 설치사업의 기본 및 실시설계 용역의 설계 품질 확보 등 설계의 내실을 도모하기 위해 건설사업관리(설계단계) 용역를 추진하고자 함

1		용역 현황

ㅇ 위    치 : 성동구 성수동1가 685-745번지 일대

ㅇ 사업내용 : 뚝섬유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계

- 저류조 설치용량 : 33,000㎥

- 부대설비 : 펌프설비, 탈취설비, 세척설비, 계측기 등

**********************************************

ㅇ 용역기간 : '24. 3. ~'25. 8.(18개월)

2		주요 추진 현항

ㅇ 서울특별시 비점오염 및 월류수 저감대책(학술용역, '11. 3월)

- 유수지 지하에 CSOs 저류조 설치로 비점오염원 관리 필요

ㅇ 강우시 하천수질 관리대책 추진계획 수립(부시장방침, '11. 9. 9.)

- '20년까지 8개 유수지 32만톤 CSOs 저류조 설치계획 수립

※ 대    상 : 가양, 새말, 양평1, 응봉, 휘경, 신도림, 탄천, 잠실

※ 새말(‘12.6)·가양(’14.3) 기 설치 운영중, 양평1('19.12.) 인수인계 중

ㅇ CSOs 저류조 설치사업 타당성조사/기본계획 용역 완료('14. 7월)

- 양평1, 응봉, 휘경, 신도림, 탄천, 잠실

ㅇ CSOs 저류조(2개소) 설치사업 기본계획 용역 완료('22. 12월)

- 뚝섬, 대치

ㅇ 뚝섬유수지 CSOs 저류조 설치 계획('23. 9. 8.)

ㅇ 뚝섬유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 용역 추진계획('23. 9. 21.)

3		추진 검토

□ 건설사업관리[설계단계] 용역

ㅇ 근    거 :「건설기술진흥법」 제39조 제3항 및 같은법 시행령 제57조

ㅇ 용 역 명 : 뚝섬유수지 CSOs 저류조 설치사업 기본 및 실시설계 건설사업관리(설계단계) 용역

ㅇ 과업내용 : 별첨 과업 내용서

ㅇ 과업기간 : 착수일로부터 18개월간

********************

ㅇ 용역 주요내용

- 건설사업관리(설계단계)

· 기본 및 실시설계 조정 및 연계성 검토

· 기본 및 실시설계단계의 예산검증 및 조정업무

· 기본 및 실시설계 용역성과 검토

· 기본 및 실시설계 용역 기성 및 준공검사관리

· 지급자재 조달 및 관리계획 수립

· 각종 인허가 및 관계기관협의 지원

· 설계자문회의 운영 및 관리

- 주요공법 및 특정자재 검토 등

****************

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 입찰자격 검토

구 분	입 찰 참 가 자 격	참여제한 업체
건설사업관리(설계단계)용역	「엔지니어링산업 진흥법」제21조에 따라 산업통산자원부에 신고된 엔지니어링 활동주체로서 같은 법 시행령 제3조 [별표1] 건설부문(상하수도, 구조, 토질·지질, 수자원개발), 기계부문(일반산업기계), 전기부문(전기설비), 환경부문(수질관리)분야를 신고하고 엔지니어링 사업자로 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의하여 건설부문(상하수도, 구조, 토질·지질, 수자원개발), 기계부문(일반산업기계), 전기부문(전기설비), 환경부문(수질관리)분야를 신고하고 기술사 사무소를 개설 등록한 업체 「건설기술 진흥법」제26조 및 같은 법 시행령 제44조에 따라 건설기술용역업(종합) 또는 건설기술용역업(설계·사업관리-일반 또는 건설사업관리)으로 시·도지사에게 등록된 업체	기본 및 실시설계 용역 낙찰업체 선정 불가
제한경쟁 (공통)	입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영엽소(본점)가 서울특별시에 소재한 업체	지역제한
참여제한 업체에 대한 규정	▷ 기본 및 실시설계 건설사업관리 「건설기술 진흥법 시행령」제58조(건설사업관리용역사어자의 선정 등)에 따라 “뚝섬유수지 CSOs 저류조 설치사업 기본 및 실시 설계”를 낙찰받은 자 및 그 계열사는 참여할 수 없음

4		향후 일정

ㅇ '23.10.~12. : 건설기술용역 타당성심의 및 발주전 심의 의뢰

(기술심사담당관)

ㅇ '24. 1.~ 2. : 용역 발주 및 사업수행능력 평가(업체선정)

ㅇ '24. 3. ~ ’25. 8. : 기본 및 실시설계 건설사업관리 시행

붙  임 : 1. 설계 내역서(안) 1부.

2. 과업 내용서(안) 1부.

3. 뚝섬유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 용역 추진계획 1부.

끝.