문서번호	정수과-8893
결재일자	2023. 9. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
장주혁		김민섭	09/26
			서한호
협 조
	행정관리과장			박세중
	주무관			조혜성
	주무관			이구연

여과사 보사 용역 계약(기간) 변경 검토 보고

여과사 보사 용역 계약(기간) 변경 검토 보고

2023. 9.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

여과사 보사 용역 계약(기간) 변경 검토 보고

2계열 호이스트 고장으로 여과지 보사 작업 추진에 차질이 발생하여  용역 기간 변경에 대해 검토하고 보고 드림

□ 관련 근거

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 용역 계약 일반조건 (계약기간의 연장)

- 발주기관의 책임으로 용역 착수가 지연되거나 용역 수행이 중단된 경우

□ 여과사 보사 용역 개요

ㅇ 계약방법 : 수의계약

ㅇ 용 역 명 : 여과지 여과사 보충 용역

- 계 약 자 : ************************************

- 계약금액 : *************************

- 용역내용 : ********************************

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비

ㅇ 용역기간 : ’23.08.10 ~ ’23.09.28.

□ 검토 내용 및 결과

ㅇ 2계열 여과지 내의 작업 중 1톤 호이스트 고장 발생 (’23.8.25.)

설치년도  : 2013.10월

- ***********************************************************

- ***************************************

※ *******************************

*****************************************************

ㅇ *************************************************************************************************

□ 계약변경 내용

ㅇ 계약기간 연장

- (당초) '23.08.10. ~ '23.09.28.

- (변경) '23.08.10. ~ '23.10.31.

ㅇ *****************

ㅇ 계약금액은 변동 없음

□ 행정사항

ㅇ 계약기간 변경 요청 (정수과 → 행정관리과)

붙 임   1. 2여과지 호이스트 고장 보고(정수시설과) 1부.

2. 합의각서(안) 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서(안) 1부.

4. 계약서 1부.  끝.