아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 계약변경 의뢰 - 남산2호터널 풍도 전기설비 개량공사

우리 사업소에서 시행 중인 「남산2호터널 풍도 전기설비 개량공사」건에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 남산2호터널 풍도 전기설비 개량공사

나. 계약기간 : 2023. 5. 17. ~ 2023. 10. 13.

다. 계약상대자 : 유한회사 새빛전력 (대표 김일주)

라. 변경 사유 : 발주처 추가작업 요청에 따른 계약기간 연장 (귀책사유 : 발주처)

마. 변경사항

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
계약기간	2023.5.17. ~ 2023.10.13.	2023.5.17 ~ 2023.10.31.

바. 예산과목 : 서부도로사업소 기전과, 재해 및 재난 예방, 재난 예방 및 복구,
재난예방(재난관리기금 재난계정), 시설비및부대비, 시설비
(예산편성부서 : 재난안전관리실 재난안전정책과)

붙임  1. 추가작업 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	기 전 과 장
주무관	곽영두		기전과장	09/26
최경주
협조자	주무관	권의현
시행	기전과-11270	(	2023. 9. 26.	)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203, 서부도로사업소 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8395	/전송	02-300-8410	/	youngdoo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)