문서번호	시설보수과-9557
결재일자	2023. 9. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김태윤		09/27
		안종필
협 조

제3처리장 A계열 지하구 소방설비 교체공사 준공기한 연기 검토 보고

2023.  9.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제3처리장 A계열 지하구 소방설비 교체공사

준공기한 연기 검토 보고

우리 센터에서 추진중인 지하구 소방공사와 관련하여 준공(납품)기한 연기 사항이 발생하여 보고드림

*****************************************************************

□ 사업개요

사 업 명	계약금액 (원)	계약업체	사업내용
*********************************	***********	********** ******	*************
******************************	**********	******** ******	*******

□ 변경내용

❍ 계약기간 변경

사 업 명	변경 전	변경 후	비 고
*********************************	****************	‘****************	***********************
******************************	‘***************	‘****************

□ 연기사유 : **************************

□ 귀책사유 : 중랑물재생센터

□ 지체상금 : 미부과

□ 검토의견

❍ 검토한 결과 준공기한 변경은 적합한 것으로 판단되어 관리과에 변경계약을 의뢰하고자 함.

붙임  1. 실정보고서 및 감리검토보고 1부.

2. 합의각서 2부.  끝.