문서번호	역사도심재생과-9526
결재일자	2019.8.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	다시세운관리팀장	역사도심재생과장
김문근	이충신	08/30 조남준

용역기간 연장 보고

(인현/진양구간 아케이드 및 퇴계로 정면 리모델링 설계 용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시재생실

(역사도심재생과)

(인현/진양구간 아케이드 및 퇴계로 정면 리모델링 설계 용역)

용역기간 연장 보고

세운2단계 공공공간 조성사업과 관련하여 인현/진양상가구간 아케이드 통로 개선 및 퇴계로 정면부 입면개선 등을 위해 실시설계 용역을 추진하고 있는바 주민의견 수렴 및 반영 등 내실 있는 용역을 위해 아래 내용과 같이 용역기간을 연장하고자 합니다.

1		용 역 개 요

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 인현/진양상가 구간 아케이드 및 퇴계로 정면부 등 리모델링 설계 용역

○ 용역기간 : **********************

○ 용 역 비 : ***********

○ 용 역 사 : *****************

○ 예산과목 : 도심 역사문화자원 관리(도시개발특별회계), 세운상가군재생사업, 시설비(공공공간 조성 공사비, 205-401-01)

□ 추진경과

○ ‘19. 05. 08. : 용역 시행 계획 방침

○ ‘19. 06. 04. : 용역 계약 및 착수

○ ‘19. 06.~07. : 기초조사 및 주민의견 수렴, 디자인안 작성, 주민설명

○ ‘19. 08. 20. : 주민 대표 설명회 실시

- 주민 전체 설명회 실시 요구 의견이 있어 추후 주민설명회 실시하기로 함

2		용역 변경계획(안)

□ 용역기간 연장

구분	당초	변경	비고
용역기간	**********************	**********************	****** ******
용역비	***********	***********	****

□ 용역기간 연장사유

○ ’19. 08. 20. 주민 대표 설명회 시 주민 전체 설명회 실시 요구 의견이 있어 추후 주민설명회 실시 및 의견 수렴, 의견 반영 등 주민의견이 최대한 반영되는 계획 수립을 위함

□ 귀책사유

○ 서울특별시(발주청 요청에 따른 용역기간 연장)

3		향 후 계 획

□ ‘19. 8. : 용역 계약 변경요청(재무과) 및 변경계약 체결

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 예정공정표 1부.  끝.