문서번호	건축기획과-5299
결재일자	2023. 3. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축정책팀장	건축기획과장
우종우		박신규	03/09
			代박신규
협조
	주무관		송현정

- 제3차 서울건축기본계획 -

수립 용역(2차) 계약기간 변경 계획

2023. 3.

주택정책실

(건축기획과)

제3차 서울 건축기본계획 수립 용역 계약기간 변경 계획

제3차 서울 건축기본계획 수립 용역(2차)에 대하여 아래와 같이 계약 변경(계약기간)을 검토하고 보고 드림

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 제3차 서울 건축기본계획 수립 용역(장기계속사업)

ㅇ 용 역 사 : (재)서울연구원

ㅇ 용역기간 : 2021.10.26. ~ 2023.03.22.

- 1차 : 2021.10.26. ~ 2022.03.27.

- 2차 : 2022.03.28. ~ 2023.03.22.

ㅇ 소요예산 : 금 335,000천원(1차 : 100,000천원 / 2차 : 235,000천원)

□ 추진경위

ㅇ 2021.04.29.	: 학술용역 추진계획 수립

ㅇ 2021.05.18.	: 학술용역심의회(결과: 적정(보완))

ㅇ 2021.07.15.	: 학술용역 추진계획 수립(변경)

ㅇ 2021.10.26.	: 학술용역 계약(총차, 1차)

ㅇ 2021.11.18.	: 착수보고 및 TF 회의 개최

- 용역 실무관계자 회의 및 실·국 담당자 집중워크숍 4차(2022.1.~3.)

ㅇ 2022.05.21.	: 총괄건축가 중간보고(1차)

ㅇ 2022.6.~8.	: 자치구 담당자 인터뷰 및 전문가 설문조사

ㅇ 2022.09.~	: 부문별 전문가 개별 자문

ㅇ 2022.02.15.	: 총괄건축가 중간보고(2차)

ㅇ 2022.02.24.	: TF 제1차 총괄회의

□ 사업개요(2차)

ㅇ 용역기간 : 2022.03.28. ~ 2023.03.22.

ㅇ 계약금액 : 금 235,000천원

ㅇ 과업내용

- 상위계획 및 관련계획 분석

∙ 상위계획인 건축정책기본계획 분석

∙ 서울특별시 도시·건축 관련 계획 및 정책현황 분석

- 서울특별시 도시·건축현황 및 여건변화 전망 분석

∙ 그간 서울시 건축정책의 주요 성과 및 부문별 취약점 원인 분석

∙ 도시·건축분야 메가트렌드 조사·분석 및 전망

- 서울 건축기본계획의 비전 및 중장기 추진방향 설정

∙ 제2차 서울 건축기본계획 주요사업 분석을 통한 성과 및 개선사항을 도출하고 이를 토대로 제3차 건축기본계획의 목표 및 추진방향 재정립

∙ 건축기본계획의 단계별 추진 전략 및 중장기 방향 설정

- 건축기본계획의 부문별 계획 및 세부 실천과제 제시

∙「건축기본법」및「서울특별시 건축기본조례」제5조에 따른 건축기본계획 내용을 포함한 세부 실천과제 도출 및 실행체계 제시

□ 변경내용

ㅇ 관련근거 :「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제14장 용역계약 일반조건 제7절 2.계약기간의 연장

ㅇ 변경사항 : 용역기간 변경(2차)

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	2021.10.26.~2023.03.22.(총차)	2021.10.26.~2023.07.22.	4개월 연장
	2022.03.28.~2023.03.22.(2차)	2022.03.28.~2023.07.22.
용 역 비	335,000천원(총차)	335,000천원	변동없음
	235,000천원(2차)	235,000천원

******

******************************************************************************

******************************

********************

□ 향후계획

ㅇ 2023. 3월	: 용역 (변경)계약 의뢰

ㅇ 2023. 3월 ~ 4월	: 전략별 전문가 TF 운영

ㅇ 2023. 5월 ~ 6월	: 주민공람, 시의회 보고 및 의견청취

ㅇ 2023. 6월	: 서울시 건축정책위원회 심의

ㅇ 2023. 7월	: 국토교통부 보고 및 서울건축기본계획 고시

붙임  1. 용역 계약기간 변경 요청서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.