아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 계약 변경 의뢰(계약기간 변경)

1. 건축기획과-5299호(2023.3.9.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 '제3차 서울 건축기본계획 수립 용역'의 계약을 아래와 같이 변경하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 제3차 서울 건축기본계획 수립 용역

나. 계 약 자 : (재)서울연구원

다. 계약금액 : 금 235,000,000원(금이억삼천오백만원정)

라. 변경내역 : 용역 기간 변경(2차)

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	2021.10.26.~2023.03.22.(총차)	2021.10.26.~2023.07.22.	4개월 연장
	2022.03.28.~2023.03.22.(2차)	2022.03.28.~2023.07.22.
용 역 비	335,000천원(총차)	335,000천원	변동없음
	235,000천원(2차)	235,000천원

마. 변경사유 : 코로나19 사회적 거리두기 시행으로 인한 회의·자문·TF 개최 지연 등으로 과업수행을 완료하기 위해 기간 연장 필요

붙임  1. 계약기간 변경 계획 1부.

2. 용역 계약기간 변경 요청서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	건 축 기 획 과 장
주무관	우종우		건축정책팀장	박신규		건축기획과장	03/10
代박신규
협조자	주무관	송현정
시행	건축기획과-5414	(	2023. 3. 10.	)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124, 서소문2청사 14층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-7100	/전송	02-768-8926	/	roora23@seoul.go.kr	/	부분공개(5)