문서번호	기전과-11506
결재일자	2023. 10. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김성균		정영술	10/04
			최경주
협 조

「남산1,2,3호터널 문자전광판(VMS) 교체」

제경비 정산 검토 및 정보통신공사 발주 추진 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  10.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「남산1,2,3호터널 문자전광판(VMS) 교체」

제경비 정산 검토 및 정보통신공사 발주 추진 계획 보고

물품 제조구매설치 사업 준공 전 제경비 정산 시행하고 추가 공종에 대해 별도 공사 발주하여 사업 추진하고자 함.

1		추진 배경

추진 경과

□******************************: 실정 보고 접수

□「기전과-11272(2023. 9. 26.)」: 설계변경 검토보고

□「기전과-11274(2023. 9. 26.)」: 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰

□ 서울지방조달청 자재구매과 설계변경 반려

- 신규 공종에 대해 산출근거 검토 필요 및 계약금액 대비 증액 비율(12.5%) 부적정

사업 개요

□ 사 업 명 : 남산1,2,3호터널 문자전광판(VMS) 교체

□ 위    치 : 남산1,2,3호터널 입구 5개소

- 남산1호 1개소(상행), 남산2호 2개소(양방향), 남산3호 2개소(상행, 하행)

※ 남산1호 하행입구는 2020년 개선 완료

□ 사업목적 : 터널 통행 시민에게 각종 정보를 정확히 표출하여 안전사고 예방

※ 각종정보 : 안전운전 안내(과속 금지, 차로변경 금지, 부당추월 금지 등), 상황전파(작업, 사고발생, 훈련, 시설물 점검 등), 시정 홍보, 캠페인, 기상상황 안내 등

□ 계약현황

- 계약업체 : ******************

- 계약기간 : 2023. 07. 12. ~ 09. 30.

- 계약금액 : *********************************

- 계약방법 : 지명경쟁입찰

□ 사업규모 : LED 문자전광판(VMS) 교체 1식

- 전광판 내부 부속품 제작 및 설치 : LED 보드, 컨트롤러, SMPS, 랜통신장비 등

- 전광판 외부 설비 제작 및 설치 : 케이스, 구조물, 안전사다리 등

- 운영시스템 구축

2		물품계약 정산 검토

실정보고 사항 및 수용 여부

□ 시공 물량 증감 ⇒ 별도 공사 발주

- 케이스 및 구조물

·기존 구조물 보수 : 용접부, 결합부 보수·보강

- 케이블 공사 : 통신 내부망 연결을 위한 일부 구간 통신케이블 공사

□ 교통통제비 사용내역 실비 정산 ⇒ 수용

□ 제경비 정산 ⇒ 수용

- 보험료(국민건강, 국민연금, 노인장기요양), 퇴직공제부금비, 산업안전보건관리비 등

세부 내역

□ 금액 변경

(단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 · 감
도급비	공급가액	***********	***********	********************
	부가가치세	**********	**********	*****************
	계	***********	***********	********************

- 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리(도시개발특별회계), 도로터널 노후 방재시설 개량, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 변경 사유 : 제경비 정산

- 세부내역

연번	시공(공종 및 물량) 내용		구분	단위	수 량			변경사유	금액 증, 감 [천원]
					당초	변경	증,감
1	교통통제비 정산		감	식				현장실정에 따른 통제일수 증가	******
2	보험료 등 정산		감	식				보험료(국민건강, 국민연금, 노인장기요양), 퇴직공제부금비, 산업안전보건관리비 등	******

조치 의견

□ 제경비 정산 내역 : 적정

- 교통통제비용 실비 정산내역 적정

- 보험료, 산업안전보건관리비 등 정산 적정

□ 신규 공종 추가 : 조달청의 설계변경 반려에 따라 별도 공사 발주 추진

- 전광판 구조물 용접부, 결합부 등의 보수

- 터널 내 통신 자가망 연결을 위한 광케이블 포설

□ 현장 실정 보고의 내용 중 제경비 정산에 대해서는 승인이 타당하다고 판단되어 변경 계약 후 변경 내역에 따라 준공처리하고자 하며, 신규 공종에 대해서는 별도로 정보통신공사업 면허 소지업체와 공사 계약 추진하여 사업의 목적에 맞는 광통신망 구축으로 원활한 제어체계 유지하고자 함.

3		공사 세부추진 계획

사업 개요

□ 사 업 명 : 남산1,2,3호터널 문자전광판(VMS) 교체 통신공사

□ 위    치 : 물품 계약 건과 동일

□ 사업목적 : 물품 계약 건과 동일

□ 사업기간 : 2023. 10. (15일 간)

□ 사 업 비 : *******

- 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리(도시개발특별회계), 도로터널 노후 방재시설 개량, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 계약방법 : 수의1인견적(여성기업)

- 자격조건 : 정보통신공사업 면허 소지자

□ 사업규모 : LED 문자전광판(VMS) 통신공사 1식

- 터널 내 문자전광판 통신 자가망 연결을 위한 광케이블 포설

- 전광판 구조물 용접부, 결합부 등의 보수

사전 심의 절차

□ 특정제품 선정심사 : 해당없음

□ 계약심사 : 해당없음

- 공사 : 추정금액 3억원 미만 정보통신공사 제외

□ 일상감사 : 해당없음

- 공사 : 추정가격 10억원 미만인 정보통신공사 제외

□ 사전규격 공개 : 해당없음

4		추진 일정

□ '23. 10. 04. : 물품계약 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰

□ '23. 10. 05. : 정보통신공사 발주

□ '23. 10. 18. : 준공

붙임  1. 실정보고 접수 공문 1부.

2. 조달청 물품수정계약통보 반려 문서 1부.

3. 물품 변경내역서 1부.  끝.