급수공사 연기 보고서(교체장애-13, 14)

시    행

급수운영과-16268

시행일자

2023. 10. 5.

수 신 자

내부결재

접수번호

접수일자

공개여부

대시민공개

주무관		급수관리팀장	급수운영과장			결재
최박		김종섭	10/05
			이규희
협 조

명에 의거 풍납동 외 11개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 합니다.

□ 공사현황

○ 공사명: 2023년 풍납동 외 11개동 상수도공사

○ 계약상대자: 파워개발(주)  대표 박석흠

□ 연기내역

연번	주 소	지시번호	당초	변경	비고
1	잠실동 252-11, 250-9	교체장애-13	2023. 9. 21.~ 2023. 10. 10.	2023. 9. 21.~ 2023. 10. 31.
2	잠실동 133	교체장애-14	2023. 9. 21.~ 2023. 10. 10.	2023. 9. 21.~ 2023. 10. 31.

○ 연기사유

- 교체장애-13: 잠실동 252-11번지 수도계량기함 보호통은 철개 위 아스팔트 포장으로 인하여 사유지 굴착 후 정비 가능한 사항이며,

잠실동 250-9번지는 앵글 밸브 고장으로 인하여 굴착 후 공사 가능한 곳이나 수요가의 공사거부에 대해 추가 협의를 위해 공사 연기를 요청함.

- 교체장애-14: 앵글밸브 고장으로 인하여 굴착 후 공사 가능한 곳으로 굴착협의 후 교체 작업이 가능한 곳으로 수요가와 추가 협의를 위해 공사 연기를 요청함.

□ 지체상금 부과여부

○ 지체상금 미부과

□ 조치의견

○ 변경 공사기간으로 연기코자 함.

붙임  급수공사 연기원 1부(별첨).  끝.