아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		강서도로사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	(마곡지구 교통안전시설물 개선공사)교통안전시설(신호,표지) 원인자부담공사 공기연장 승인통보

서울주택도시공사 마곡위례사업부-4186호(2023.9.26.)와 관련하여 공사기간 연장요청을 아래와 같이 승인하오니 기간내 사업을 완료할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 마곡지구 교통안전시설물 개선공사

2. 원 인 자 : 서울주택도시공사

3. 공사장소 : 강서구 공항대로 및 마곡중앙로 등

4. 공사내용 : 교통신호기 및 교통안전표지 설치

5. 연장사유 : 선행공사(토목공정) 지연으로 인한 공기연장

6. 공사기간 연장내용

구 분	승인 전	승인 후	비고
****	************* ***********	************* ***********	******

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장), 서울주택도시공사 사장, (주)트래픽스
주무관	박준규		기전과장	10/05
김병용
협조자
시행	기전과-10186	(	2023. 10. 5.	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 기전과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	jkp1209@seoul.go.kr	/	부분공개(5)