문서번호	시설관리과-16561
결재일자	2023. 10. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
손현두	김영민	이규현		10/06
				권태규
협 조
	주무관		이영훈

『월계1중블록 급수체계 구축 사업 시행에 따른』

원격감시반 및 구역유량계 설치 계획

2023. 10. 5. (목)

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

『월계1중블록 급수체계 구축 사업 시행에 따른』

원격감시반 및 구역유량계 설치계획

시설관리과장 : 이규현☎3146-3390 기전팀장 :김영민☎3414 담당 : 손현두☎3415

우리 사업소 월계1중블록 급수체계 구축 사업 시행에 따라 원격감시반

및 구역유량계를 설치하여 아리수 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

□ 월계1중블록 급수체계 구축공사 시행(시설관리과-6081, ’23. 4. 6.)

□ 2023년 상수도 블록시스템 공급체계 구축계획(배수과-27765, ’22.12.27.)

□ 유량계 업무처리 지침 개정(안)(누수방지과-5117, ’14. 9.)

Ⅱ		추진 개요

□ 사 업 명: 원격감시반 및 구역유량계 설치

□ 규    모: 원격감시반 및 구역유량계 각 1개

□ 사업기간: 2023. 10. 6.~2023. 12. 31.

□ 소요예산: ********

ㅇ 원격감시반 제작구매 설치 ··· ********

ㅇ 유량계 구매 설치 ···············  *******

ㅇ 전기공사 ···························  *******

ㅇ 한전 시설부담금 납부 ·········    *****

□ 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ		발주 방법

□ 원격감시반 제작구매 설치: 지명경쟁 입찰

ㅇ 관련 근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제22조(지명입찰에 의한 계약) 제5호 및 제10호

□ 유량계 구매 설치: 조달구매(제3자단가)

□ 전기공사: 수의계약(소액)

Ⅳ		주요 일정

일 정	내 용	소요일수
***********	「원격감시반 제작구매 설치」계약심사 의뢰(→ 계약심사과)	약 5일
	우수업체 추천의뢰(→ 한국자동제어공업협동조합)
************	예산 재배정 요청(시설관리팀)	약 2일
************	「원격감시반 제작구매 설치」계약 의뢰(→ 행정지원과)	약 10일
	전기공사 계약 의뢰(→ 행정지원과)
************	계약 및 착수	약 60일
************	검수 및 준공

※ 선행 공종인 토목 공사와 연계하여 시행

Ⅴ		행정 사항

□ 유량계실 출입자의 안전을 고려한 맨홀 설치: 시설관리팀

ㅇ 교정검사 빈도가 높은 구역유량계임을 감안하여 출입자의 안전을 우선 고려한 유량계실 맨홀 위치 선정으로 중대재해 발생 요인 제거

끝.