문서번호	시설관리과-18082
결재일자	2023. 10. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
시설관리팀장		시설관리과장
김재영		10/06
		문병희
협조

(방배배수지(3지) 내부방식공사) 설계변경(계약금액변경 1차수) 시행보고

2023년 10월

강남수도사업소

시설관리과

(방배배수지(3지) 내부방식공사)

설계변경(계약금액변경 1차수) 시행보고

우리사업소 시행중인「방배배수지(3지) 내부방식공사」에 대해 공정관리 및 예산의 효율적 집행을 위하여 설계변경 심의회를 개최 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		개 요

공 사 명 : 방배배수지(3지) 내부방식공사

공사개요 : 도막식 방수방식 : 7,200㎡ 등 3개소

계약업체 : (주) 서림에이엔씨 최춘서

계약기간 : 2023.7.25.(계약일) ~ 2024. 6.16.

계약금액 : ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊원(증＊＊＊＊＊＊＊＊＊)

Ⅱ		설계변경 사항

설계변경 사유

○ 1차 예산의 불용을 최대한 방지하고 예산의 효율적 집행을 위하여 설계

변경이 필요함.

설계변경 심사 결과

구 분	금 액		증·감(원)
	심사전(원)	심사후(원)
도 급 비	＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊

○ 세부 심사의견

- 설계변경의 타당성 : 타당함

- 제경비 적정 산정 및 적용 적정성 여부 : 타당함

- 신규공종 단가 산출 등 적정성 여부

- 각종 제반규정 준수 여부 : 준수

- 관련 규정 불명확한 내용에 대한 검토 등 : 적정함

1차수별 변경내역

구 분	당 초	변 경	증, 감	기 간
총부기금액	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊
1차수 금액	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊

Ⅲ		조치의견

위와 같이 계약금액(1차수)을 변경하여 최대한 예산 불용없이 효율적인 사업을 추진하고자 본 심의결과에 의거 설계변경 시행 및 변경계약을 의뢰코자 합니다.

첨 부 : 1) 설계변경 심의 의견서 1부.

2) 설계변경사유서 1부.

3) 설계변경내역서 각 1부.  끝.