아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 변경에 따른 계약의뢰(2023년 가락동 장기사용 배급수관 정비공사)

우리사업소에서 시행하는 아래 공사에 대하여 다음과 같이 준공기한을 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명: 2023년 가락동 장기사용 배급수관 정비공사

2. 계 약 자: *******

3. 계약금액: *************

4. 예산과목: 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비,장기사용송배수관(350mm이하) 정비

5. 변경사항

-  공사기간 당초: 2023. 4. 17. ~ 2023. 10. 18.
변경: 2023. 4. 17. ~ 2023. 12. 29. (총 72일 연기)

6. 변경사유: 공사관련 유관기관 협의로 인한 실착공 지연

붙임  1. 준공기한 연기 검토보고 1부.
2. 합의각서 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	최성현		급수운영팀장	代송정호		급수운영과장	10/06
이규희
협조자
시행	급수운영과-16390	(	2023. 10. 6.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5144	/전송	02-3154-5189	/	tjdgus1996@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)