문서번호	설비부-15803
결재일자	2023. 10. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
이동걸		김현기	10/11
			신용휴
협 조

[서울영화센터 건립 통신공사]

실정보고(1회) 검토 보고

2023. 10.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

[서울영화센터 건립 통신공사]

실정보고(1회) 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는 [서울영화센터 건립 통신공사]와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 실정보고 건에 대하여 검토 후 아래와 같이 보고드림.

□ 관련근거

o 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무지침서 제97조(설계변경관리)

*************************************************

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 서울영화센터 건립 통신공사

ㅇ 위    치 : 중구 초동 64-11

ㅇ 규    모 : 지하3층/지상10층, 연면적 4806.11㎡

******************************************

*********************************************

*************************************

*******************

********************************

< 위치도 및 현황사진 >

□ 검토내용

ㅇ 실정보고 사유 및 내용

- BF인증 대상 설치기준 반영

·통합배선설비 공종 출입구 장애인음성유도기 2개소 추가

·비상벨설비 공종 장애인화장실 비상벨, 배관배선 추가

- 안전사고 예방을 위한 설계개선

·CCTV설비 공종 8층, 9층 음영지역 카메라 1대 추가

·층별 계단부 출입구 출입통제설비 추가

·인터폰설비 공종 3층, 6층 공조실 ~ 방재실간 인터폰 추가

·여자화장실 안심콜 반영을 위한 비상벨, 배관배선 물량 변경

- 현장여건 변동에 따른 설계 변경

·방송설비 공종 8개층 ATT(3선식) 배관배선 물량 변경

·CATV설비 공종 방재실 TV메인 증폭기함 추가

ㅇ 주요공종 수량 변경

공 종	구 분	규 격	단 위	수 량				비 고
				당 초	변 경	증·감
******	*****	******	**	**	**	**	*
******	******	******************	***	*	*	***	***
****	****	*********	*	*****	*****	***	****
******	******	**************	*	*****	*****	***	**
******	**********	******************	**	*****	*****	***	*****
*****	******	*	**	**	**	****	*
*****	**************	*	**	**	**	***	**

ㅇ 공사비 공종별 증·감 내역

[단위:원]

공 종	당 초	변 경	증·감액	비 고
1. 통합배선설비공사	83,611,290	83,179,006	감) 432,284
2. CATV설비공사	28,757,853	29,777,777	증) 1,019,924
3. 방송설비공사	72,135,118	73,942,765	증) 1,807,647
4. CCTV설비공사	22,338,789	23,294,530	증) 955,741
5. 출입통제설비공사	46,619,724	98,634,502	증) 52,014,778
6. 인터폰설비공사	12,302,281	14,372,453	증) 2,025,172
7. CABLE TRAY설비공사	34,179,173	34,179,173	-
8. A/V설비공사	9,708,308	9,708,038	-
9. 비상벨설비공사	24,944,029	42,135,200	증) 17,191,171
10. 주차관제설비공사	2,438,724	2,438,,724	-
소 계			증) 74,582,149
간 접 비			증) 28,984,851
합 계			증) 103,567,850

ㅇ 도급비 변경내용

[단위:원]

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
***	588,543,000	692,110,000	증* 103,567,000
***	11,312,000	-	*	****
2**	577,231,000	680,798,000	증* 103,567,000

□ 검토의견

ㅇ 건설사업관리단 의견

***************************************************************************************************

ㅇ 보고자 의견

*************************************************************

붙임  건설사업관리단 실정보고서 1부.  끝.