문서번호	토목부-18715
결재일자	2023. 10. 11.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		이성주	10/11
			이임섭
협조
	주무관		이상현

- 성산대교 본교 성능개선공사 -

실정보고(성산대교 본교 공사 전 재하시험 실시) 검토 보고

2023. 08.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 성산대교 본교 성능개선공사 -

실정보고(성산대교 본교 공사 전 재하시험 실시) 검토 보고

성산대교 본교 성능개선 공사 전 재하시험 실시 실정보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

□ 근    거

ㅇ 성산대교 본교 공사 전 재하시험 실시 실정보고(성산본교 23-150호, `23. 10. 11.)

ㅇ 공사 전 재하시험 추진계획 보고(토목부-11006, `23.06.16.)

□ 공사개요

ㅇ 사 업 명 : 성산대교 본교 성능개선공사

ㅇ 규    모 : 교량 성능개선(DB18→DB24, B=27.0m, L=880.0m)

ㅇ 총사업비 :********************************************************

ㅇ 사업기간 : `21. 01. 20. ∼ `25. 10. 25.

- *********************************************************************

- ****************************************************************

ㅇ 시 공 사 : *************

ㅇ 감 리 사 : *********

□ 실정보고 검토

ㅇ 재하시험 목적

- 교량을 구성하는 주요 부재들의 실제 거동 계측

- 성산대교 공사전 바닥판 재하시험을 실시하여 바닥판 교체후 시험결과와

비교분석 기초자료로 활용

- 재하시험 결과를 분석하여 PC바닥판 이음부보강, 균열저감방안 등 모색

ㅇ 재하시험 위치(P10~P11)

P5

P11

P6

P7

P8

P9

P10

P4

P12

ㅇ 재하시험 방법

정적 재하시험

동적 재하시험

변위계 및 변형률계 설치

↓

측정기기 영점 조정

↓

정적하중 재하

↓

정적 변위 및 변형률 Recording

변위계 및 변형률계									가속도계
						영점 조정
시험차량 주행									FFT 분석기
동적 변위 및 변형률 Recording									진 동 해 석

ㅇ 시험구간(P10~P11)

▷당 초(5단면)
▶조 정(3단면)

※ 당초 재하시험계획 시 S11-2구간에 5단면을 실시하고자 하였으나, 계측기 설치 시 공간협소와

접근난이로 안전사고위험이 있어 2단면〔1/4지점(단면 B-B), 신축이음부(단면 D-D)〕을 제외

하였으며 교량의 정적, 동적 거동 특성 평가는 계획대로 수행할 수 있어 시험구간을 조정.

ㅇ 계측기 설치수량

구 분	A-A	B-B	C-C	계
변형률계	10	8	12	30
가속도계	1	1	1	3
계	11	9	13	33

ㅇ 재하차량 주행계획(덤프트럭 15ton, 2대)

구 분		주행방향	주행차로	주행속도(km/h)	비 고
본 교	상류측	남단 → 북단	3차로	40 km/h	재하차량 A
				50 km/h
				60 km/h
	하류측	북단 → 남단	3차로	40 km/h	재하차량 A
				50 km/h
				60 km/h

ㅇ 신규 단가 협의

- 협 의 일 : `23. 10. 11.(수)

- 참 석 자 : 발주처 공사담당 이회진 / 시공사 현장대리인 김건겸

- 협의결과 : 협의율 적용

공 종	시공사(안)	발주처(안)	적 용
본교 재하시험	신규단가 산출하여 설계가 100% 제안	낙찰률 75.530% 제안	협의률(87.765%) 적용

ㅇ 공사비 증·감 내역 **********

(단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증ㆍ△감	비 고
본교 재하시험	*	*******	*******	제요율적용 제외공종
직 접 공 사 비	*	******	******
부 가 세	*	*****	*****
도 급 공 사 비	**	******	******

※ 시험비용은 엔지니어링사업대가기준과 견적가를 비교하여 견적가 중 최저가 적용

□ 검토결과 및 조치계획

ㅇ 본교 성능개선공사 전 재하시험 실시계획은 적정하다고 판단되며 추후

설계변경 시 반영 하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리단 실정보고서 1부.끝.