아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 변경계약 의뢰 - 2023년 IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축사업

1. 관련근거

-「2023년 IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축사업」설계변경 검토보고

(기전과 - 11722호, '2023. 10. 06.)

2. 우리 사업소에서 추진 중인「2023년 IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축사업」의 실정사항 이 접수되어 이를 검토한 바, 아래와 같이 변경계약을 의뢰하고자 하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 변경 개요

가. 사 업 명 : 2023년 IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축사업

*****************************************

**********************************

라. 변경내용

구 분	변 경 전(a)	변 경 후(b)	변경금액(b-a)
총 소요예산	*********	*********	**********
계약기간	착수일로부터 '2023. 10. 24.	착수일로부터 '2023. 11. 10.	-

마. 변경사유 : 실정사항에 따른 계약금액 변경

- 자세한 내용은 붙임파일 1. 참조

바.  예산과목 : 서부도로사업소 기전과, 도로시설관리, 도로시설물 운영(일), 도로조명설비 원격점검 체계 구축, 일반운영비, 공공운영비

붙임 1. 실정보고서 검토보고서, 공문 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	기 전 과 장
주무관	주현탁		기전과장	10/10
최경주
협조자	주무관	이숙영
시행	기전과-11784	(	2023. 10. 10.	)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203, 서부도로사업소 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8404	/전송	02-300-8410	/	wngusxkr12@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)