문서번호	시설관리과-17845
결재일자	2023. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
지예솔		정수용	10/12
			代김형식
협조

「등촌1구역재건축사업구역 내」

기존 상수도 철거 및 폐쇄공사 착공계 제출에 따른 검토보고

2023. 10.

시설관리과

「등촌1구역재건축사업구역 내」 기존 상수도 철거 및 폐쇄공사 착공계 제출에 따른 검토보고
'23.10.12.(목)	시설관리과장 : 이재학 ☎3146-3990 시설관리팀장 정수용 ☎3994 담당 지예솔☎4007

우리사업소 관할 지역인 등촌1구역재건축사업구역 내 기존 상수도관에 대한 폐쇄공사 착공계가 접수됨에 따라 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 접수현황

○ 관련근거

- 공사착공계(등촌1구역 주택재건축정비사업)제출건[등촌1재 제23-04호]

○ 공사현황

- 공 사 명: 등촌1주택재건축정비사업 중 상수도폐쇄공사

- 시 행 처: 등촌1주택재건축정비사업조합

- 시공회사: 태윤건설 주식회사

- 공사기간: 2023년 9월 11일 ~ 2023년 12월 31일

- 공사개요

• 인입관 분기점 폐쇄(새들잠금 및 새들캡 설치)

• 분기점 폐쇄

- 위 치 도

□ 검토내용

○ 시공자격 검토 여부

- 사업자 상·하수도 기술면허 여부

사업자명	대표자	법인등록번호	업종	검토결과	비고
*******	***	**************	*********	적정

- 현장대리인 기술면허 여부

직무분야	성 명	생년월일	자격종목	기술등급	검토결과	비고
*********	***	***********	**	**	적정

- 시공감리 선정 적정 여부

소속	성 명	생년월일	자격종목	기술등급	검토결과	비고
**********	***	***********	**	**	적정

○ 시공계획서 검토 여부 → 보완

- 공사계획 검토

· 분기점 폐쇄 및 시공상세도 제출 적정

· 가정 인입관 D20~50㎜ 분기점 폐쇄 → 보완(사진 첨부)

- 시공계획 검토

· 시공참여자 및 장비투입계획 적정

· 단수계획서 수립 후 제출, 승인시 2일전 세대별 안내문 배포 적정

- 품질 및 안전관리계획 검토

· 품질관리자 선정, 시험시공, 자재, 장비 내역 적정

· 안전시설 설치 및 점검, 교육 등 안전관리 철저

○ 사급자재 승인원 검토 → 적정

- 검토항목: 덕타일 주철관 등 7종

- 검토사항: 위생안전기준(KC) 및 한국산업규격표시(KS)등

· 검토방법: 위생안전기준 인생등록정보망 및 KWWA 등

- 검토결과: 이상없음

○ 고재처리비 부과에 따른 이행사항

- 민영 재개발.재건축 사업 부지 내 폐지되는 상수도 시설물의 '감정평가서'와 신설 수도시설 '비용계산서' 제출에 따라 고재처리비를 정산 예정

※ 관련문서: 재개발, 재건축 지역 내 고재처리비 부과 개선 알림[급수설비과-286('21.01.08.)]

□ 행정사항

○ 해당 재건축 지역내 상수도 시설물 철거·폐쇄 공사 착공계에 대하여 착공계 보완 사항 및 고재처리비 부과에 따른 이행사항에 따라 감정평가서 및 비용계산서를 제출 요청코자 함

붙임  1. 착공계 1부.  끝.